서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰 (남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사)

1. 버스정책과-4499호(2018.2.19.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 「남산1호 터널 앞 버스정류소 설치공사」에 대해 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내역

계약건명	계약금액	계약자	준공기한
남산1호 터널 앞 버스 정류소 설치공사	￦473,749,660	에스케이피건설㈜ 대표 심 귀	2018.4.19

나. 준공기한 연기내역 : 당초)2018.4.19.→변경)2018.6.30

다. 연기사유 : 동절기 굴착통제에 따른 공사중지 일수 반영

라. 귀책사유 : 서울특별시

붙임 1. 준공기한 연기방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 계약자 합의각서 1부  끝.

	버스정책과장
★주무관	이오수		정류소관리팀장	이희신		버스정책과장	02/27 김정윤
협조자	계약1팀장	조현
시행	버스정책과-5242	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사별관 1동 7층	/
전화	2133-2296	/전송	2133-1049	/	whrornfma@seoul.go.kr	/	부분공개(7)