투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재(교량받침-매크로드) 납품기한 연기요청

1. 관리단속과-677호(2018.1.23)와 관련입니다

2. “영동2교 외 1개소 내진보강공사” 에 소요되는 관급자재(교량받침-매크로드)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 변경현황

품 명	규 격	수 량	납품요구번호	납품 기한		비 고
				당초	변경
교량받침 매크로드(주)	FRB-1000-96-G,250*400*t96mm, 1000kN,일방향	4	12-17-1 -88657-00	2018. 2. 28	2018.6. 29
교량받침 매크로드(주)	FRB-1000-96-A,250*400*t96mm, 1000kN,양방향	8	ʺ	ʺ	ʺ
교량받침 매크로드(주)	FRB-2800-73-F, 400*600*t73mm, 2800kN,고정단	2	ʺ	ʺ	ʺ
교량받침 매크로드(주)	FRB-2800-73-G,400*600*t73mm, 2800kN,일방향	6	ʺ	ʺ	ʺ
교량받침 매크로드(주)	FRB-2800-73-A,400*600*t73mm, 2800kN,양방향	4	ʺ	ʺ	ʺ
교량받침 매크로드(주)	FRB-280-105-G,400*600*t105mm, 2800kN,일방향	4	ʺ	ʺ	ʺ
교량받침 매크로드(주)	FRB-280-105-A,400*600*t105mm, 2800kN,양방향	8	ʺ	ʺ	ʺ
계		36
교량받침 매크로드(주)	EBC8000-110-F, 800*800*t110mm, 8000kN,고정단	2	12-17-1 -88658-00	2018. 2. 28	2018. 6. 29
교량받침 매크로드(주)	EBC8000-110-G, 800*800*t110mm, 8000kN,일방향	6	ʺ	ʺ	ʺ
교량받침 매크로드(주)	EBC8000-110-M, 800*800*t110mm, 8000kN,양방향	4	ʺ	ʺ	ʺ
계		12

나. 변경사유 : 해빙기 이후 공사 시행을 위한 납기 조정

다. 귀책사유 : 동부도로사업소(시설보수과).  끝.

	시설보수과장
주무관	김종범		시설보수과장	02/27 김유찬
협조자	주무관	나철흠
시행	시설보수과-938	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0377	/전송	2040-0308	/	kjb61@seoul.go.kr	/	대시민공개