문서번호	동북권사업단-11670
결재일자	2017.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	서울아레나팀장	동북권사업반장		동북권사업단장
이시연	이유국	한병준		11/29 이정화
협 조

- 동북권체육공원 주변 보행환경개선 사업  -

기본 및 실시설계 용역 설계변경 보고

2017. 11.

동북권사업단장

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 동북권체육공원 주변 보행환경개선 사업 -

기본 및 실시설계 용역 설계변경 보고

「동북권체육공원 주변 보행환경개선 사업 기본 및 실시설계 용역」관련 과업내용 변경(‘17.10.27.)에 따른 설계변경을 추진코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 동북권체육공원 주변 보행환경개선 사업 기본 및 실시설계 용역

○ 용역업체 : ㈜동일기술공사, 명원종합건축사사무소

○ 계약금액 : 99,000천원

○ 용역기간 : ’17. 7. 4. ~  ’17. 11. 30.

○ 과업내용

- 측량 등 기초조사, 관계법령 및 상위계획 검토

- 도시계획시설 변경(결정) 절차 이행 관련 도서 작성

- 개발제한구역 내 행위허가 관련 검토 및 도서 작성

- 도시경관개선 계획 수립

- 기본 및 실시설계 도서 작성

□ 추진경위

○ ‘16. 7. 8. ~ ’17. 2. 28. : 기본계획 수립

○ ‘17. 3. ~ 4. : 관계부서 협의 및 전문가 자문회의 개최, 사업방침 수립

○ ‘17. 5. ~ 6. : 기본 및 실시설계 용역 발주

○ ‘17. 7.    4.  : 용역 계약 및 착수

○ ‘17. 7.  19.  : 착수보고회 개최

○ ‘17. 8. ~ 9. : TF회의 개최(2회)

○ ‘17. 10. 27.  : 용역 과업내용 및 준공기한 변경

□ 설계변경(안)

○ 금액변경

(단위 : 천원)

구분	당초	변경	증감
금액	99,000	100,000	증) 1,000

○ 변경사유

- 과업 수행 중 도봉구 요청(‘17.10.)으로 과업내용을 변경(역사 북측 하부공간 정비 → 도봉산역 환승센터 ~ 동북권 체육공원 직결 연결통로 설치)함에 따라 발생한 공사비 증액에 따른 설계비 증액

‣ 공사금액 변경 : 472백만원(당초) → 782백만원(변경)

- 다만, 설계도서 작성 외 도시경관개선 계획 수립, 도시관리계획 변경(결정) 관련 도서 작성은 사업거리 축소에 따라 용역비 감액

‣ 도시경관개선 : 223m(당초) → 61m(변경)

‣ 도시관리계획 : 150m(당초) → 60m(변경)

○ 변경내역

(단위: 원)

구 분			당초	변경	증감
총용역비			99,000,000	100,000,000	증)1,000,000
1.		기본 및 실시설계	32,874,000	49,463,182	증)17,092,464
2.		추가업무	57,448,152	41,293,063	감)16,155,089
	가.	측량	2,418,277	2,418,277	-
	나.	지질조사	-	1,500,000	증)1,500,000
	다.	도시경관개선 계획	20,654,921	10,934,743	감)9,720,178
	라.	도시관리계획 변경	22,165,786	12,746,040	감)9,419,746
	마.	개발제한구역 내 행위허가	7,246,168	8,731,003	증)1,484,835
	바.	최종 성과품 작성	1,363,000	1,363,000	-
	사.	입체도면 제작	3,600,000	3,600,000	-
3.		용역손해배상공제보험	183,773	182,940	감)833
4.		부가가치세	9,000,000	9,090,909	증)90,909

□ 예산과목

○	지역발전본부 동북권사업단, 도시경제기반형 활성화계획 추진, 도시재생 계획수립(도시개발), 동북권 체육공원 주변 보행환경 개선, 시설비

□ 향후일정

○ ‘17. 11. : 설계변경 의뢰(→재무과) 및 용역 준공

○ ‘17. 12. : 도시관리계획 변경 등 절차 이행 및 공사 발주

○ ‘18.  6.  : 공사 준공

붙임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 합의각서 및 지분변동내역 1부.  끝.