문서번호	설비부-2664
결재일자	2018.2.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		임병국	02/28 권오식
협조
	주무관		노순재

‘중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사’

실정보고에 대한 검토보고

2018. 02.

도시기반시설본부

(설비부)

중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사’

실정보고에 대한검토보고

우리 본부에서 시행 중인 ‘중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사’관련, 건설사업관리기술단으로부터 제출된  실정보고 사항에 대하여  검토 하고 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

○ 공사규모 : 보행교량 설치(폭 4.5m, 연장 191m)

○ 주요설비 : 경관조명설비,CCTV 설비, 엘리베이터 3대

○ 공사기간 :′16.4.29. ~ ′18.4.28.

○ 공 사 비 : 6,454백만원(전기 701, 토목 5,753)

○ 시 공 사 : ㈜평화전기건설(전기),한양산업개발㈜(토목)

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트외 1

Ⅱ		관련 근거

○ `16. 3. 4 : 공사관리관 업무 담당자 지정 요청(토목부-4122)

○ `16. 5. 27: 엘리베이이터 추가설치 요청(노원구 토목과-9204)

○ `17. 9. 6: 관급자재 구매계획 검토보고(설비부-15216)

○ `17.11.10: 교각3 엘리베이터 추가설치 실정보고(토목부-23567)

○ `17.12.29: 엘리베이터 구매 방법 변경 검토 보고(설비부-22011)

○ `18 .01.25 : 노원구 협의(토목과-1234) 엘리베이터 및 추가시설 반영 요구

○ `18 .02.27: 엘리베이터 설치 및 추가시설관련대콘(초안산)제18-50호

Ⅲ		실정보고 내용

○실정보고 사유

- 지역주민 및 유지관리부서(노원구) 요청사항에 따라 노약자 및 장애인

이용을 위한 엘리베이터 설치 및 추가 시설(ARD 및 홍수관제시스템) 반영

○엘리베이터 설치 계획 현황(3개소)

구 분	규 격	수 량	위 치	비 고
엘리베이터	15인승, MRL타입	3대	교각1, 3, 5

※ 구매방식 : 당초)관급자재 → 변경)사급자재[설비부-22011(`17.12.29)근거]

3개소

○ 노원구청 요청사항(추가 시설물) 적용 검토

구 분		수량	검토의견	비 고
명 칭	사 유
ARD (정전시 자동구출장치)	승강기 안전검사기준	3set	이용객의 안전을 위해 설치 적정	적용
비상통화장치 (무선용)	승강기 안전검사기준	3대	이용객의 안전을 위해 설치 적정	적용
홍수관제시스템	노원구청 요구사항	1대	이용객의 안전과 시설물 유지보수를 위해 설치 적정	적용
냉방기	노원구청 요구사항	3대	하절기 이용객의 쾌적한 환경을 위해 설치 적정	적용
차폐시설	노원구청 요구사항	1대	- 효능에 비해 과다한 예산 소요 - 홍수로 하천물 유입시 대처수단 (홍수관제 시스템, 양수 및 물청소후 가동) 처리가능	비적용

○ 공사비 증감 현황                                      (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	(증 . 감)
엘리베이터(15인승)	-	167,878	167,878
ARD(정전시자동구철장치)	-	9,211	9,211
비상통화장치	-	1,408	1,408
홍수관제시스템	-	9,384	9,384
냉방기	-	8,446	8,446
직접공사비	-	196,327	196,327
제경비	-	63,526	63,526
관 급 자 재 비	204,750	-	-204,750
공 사 비 계	204,750	259,853	(증)55,103

○ 소요예산 : 금 259,853천원

○ 건설사업관리단 : 상기와 같이 시공사에서 제출한 실정보고 내용을 검토한 결과,승강기 안전기준 강화(‘17.07. 개정)에 따라 ARD(자동구출장치) 및 비상 통화장치(무선) 반영하고, 유지 관리 주체인 노원구청 요구 사항인 이용객의 안전과 쾌적한 환경을 조성 위해 홍수관제시스템(교각3)을 반영하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자의 의견

○ 승강기 안전기준 강화 및 이용객의 편의을 위해 책임건설사업기술자의  검토보고 내용이 타당함으로 실정보고 사항을 승인하고자 함.

○ 원활한 공정 및 통합관리를 위해 엘리베이터 구매설치 건을  도급공사 사급자재로 반영 조치하여 전체 공정관리에 지장이 없도록 조치함이 타당할 것으로 판단됨.

따로붙임: 실정보고 관련 문서 각 1부. 끝.