투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	공사기한 및 납기 변경요청(봉화황평분교)_3차

1. 우리 사업소에서 시행하고 있는 『봉화황평분교 가족자연체험시설 조성(전기, 통신, 소방) 공사』 준공기한 및 공사를 위해 조달구매하여 지급할 물품의 납기를 붙임과 같이 변경코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

공사기한 및 납기 변경요청 내용

항목분류				계약자	준공(납품)기한 변경		변경계약금액	비고
					변경전	변경후
전기	공사			우진건설㈜ 권제원	18.02.28.	18.03.12.	93,431,420	180320계약서 필요
	조달	옥외등		에이컴조명 이은미	18.02.28.	18.03.26.	2,216,000	"
		옥외등주		에이컴에너지㈜ 지정철	18.02.28.	18.03.26.	3,680,000	"
		분전반		벡스텍㈜ 장세용	18.02.28.	18.03.26.	6,719,000	"
		실내등		포스라이팅 박병기	18.02.28.	18.03.26.	8,860,000	"
		실내다운라이트등		포스라이팅 박병기	18.02.28.	18.03.26.	1,768,000	"
		LED등		포스라이팅 박병기	18.02.28.	18.03.26.	1,598,400	"
통신	공사			우신통신㈜ 장성주	18.02.28.	18.03.26.	19,276,680	"
	조달	CCTV	㈜영국전자	영국전자 김배훈	18.02.28.	18.03.26.	13,511,000	"
			솔텍	솔텍인포넷 이해진	18.02.28.	18.03.26.	17,640,000	"
			이노뎁	이노뎁㈜) 이성진	18.02.28.	18.03.26.	2,200,000	"
		방송	디라직	㈜디라직 박성기	18.02.28.	18.03.26.	2,820,800	"
소방	공사			㈜산업전기소방 김진현	18.02.28.	18.03.26.	12,713,450	"

붙임 : 1. 봉화황평분교 가족자연체험시설 전기( 통신, 소방) 공사 완료기한 변경 보고서 2부.  끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설관리팀장	장창원		시설과장	02/28 代송복식
협조자
시행	시설과-406	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	대시민공개