문서번호	시설과-405
결재일자	2018.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
강희진	장창원	代송복식		02/28 이용태
협 조
	경리팀장		곽선아

『봉화군황평분교 가족자연체험시설 공사(전기)』

공사기한 연장 검토 보고_3차

2018. 2

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『봉화군황평분교 가족자연체험시설 공사(전기)』

공사기한 연장 검토 보고

『봉화군황평분교 가족자연체험시설 공사(전기)』 시행과 관련하여, 다음과 같이 공사기한 연장을 검토 보고합니다.

Ⅰ		추진개요

○ 공 사 명 : 봉화군황평분교가족자연체험시설 전기공사

○ 공사내용 : 평상전열, 조명

○ 착공‧준공 : 2017.10.30. ‧ 2018.02.28

○ 도 급 자 : 우진건설(주) 권제원, 권준혁

○ 도 급 비 : 93,431,420원

Ⅱ		추진경위

○ 2017. 10.26(전기, 소방), 30(통신) : 공사 계약

○ 2017. 10.30 : 착공

Ⅲ		준공기한연기검토

❍ 연기기간

- 당  초 : 2017.10.26.~ 2018.02.28.

- 변  경 : 2017.10.26.~ 2018.03.12.

❍ 연기사유

- 전기 공사구간 추가(8개 평상 추가(작은 운동장 내))를 1차 구두 통보 및 2차 공문통보(‘17.12.11) 하였는데, 17.12월초에 운동장 토사의 동결로, 작은 운동장 주변 외등기초 2개소 등 미시공 부분이 있어, 미시공인 부분의 공사 진행에 기간이 필요하여 전기 준공기한 연장필요하며, 전기부분 관급자재(도급자 시공) 납품기한 연장 필요

❍ 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 : 미부과

Ⅳ		보고자의견

❍ 상기와 같이 준공기한을 연장하여 시공에 만전을 기하고자 함. 끝.