문서번호	시설과-404
결재일자	2018.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
강희진	장창원	代송복식		02/28 이용태
협 조
	경리팀장		곽선아

『봉화군황평분교 가족자연체험시설 공사(통신, 소방)』

공사기한 연장 검토 보고_3차

2018. 2

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『봉화군황평분교 가족자연체험시설 공사(통신, 소방)』

공사기한 연장 검토 보고

『봉화군황평분교 가족자연체험시설 공사(통신, 소방)』 시행과 관련하여, 다음과 같이 공사기한 연장을 검토 보고합니다.

Ⅰ		추진개요

	전기	통신	소방	비고
공사명	봉화군황평분교가족자연체험시설 전기공사	봉화군황평분교가족자연체험시설 통신공사	봉화군황평분교가족자연체험시설 소방공사
내용	전열, 조명	CCTV, 방송, 전화	자탐설비, 소화기
착공	2017.10.30	2017.10.30	2017.10.30
준공	2018.02.28	2018.02.28	2018.02.28
도급자	우진건설(주)권제원	우신통신(주)장성주	㈜산업전기소방 김진현
도급비	93,431,420	19,274,680	12,713,450

Ⅱ		추진경위

○ 2017. 10.26(전기, 소방), 30(통신) : 공사 계약

○ 2017. 10.30 : 착공

Ⅲ		준공기한연기검토

❍ 연기기간

- 당  초 : 2017.10.26.~ 2018.02.28.(소방)

2017.10.30.~ 2018.02.28.(통신)

- 변  경 : 2017.10.26.~ 2018.03.26.(소방)

2017.10.30.~ 2018.03.26.(통신)

❍ 연기사유

- 전기 공사구간 추가(8개 평상 추가(작은 운동장 내))를 1차 구두 통보 및 2차 공문통보(‘17.12.11) 하였는데, 17.12월초에 운동장 토사의 동결로, 작은 운동장 주변 외등기초 2개소 등 미시공 부분이 있어, 미시공인 부분의 공사 진행에 기간이 필요하여 전기 준공기한 연장필요하며, 선행공정인 전기공사의 미시공으로 통신(외등에 CCTV 설치 등) 및 소방(자동화재탐지설비(전기 공급필요) 등) 공사에 미시공된 부분의 시공을 위하여 준공기한 연장 필요

❍ 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 : 미부과

Ⅳ		보고자의견

❍ 상기와 같이 준공기한을 연장하여 시공에 만전을 기하고자 함. 끝.