투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	지하철9호선 3단계 시스템분야 전면책임감리용역(총차3회,4차1회)변경계약 의뢰

1. 재무과 계약번호 20141251501(`14.12.29),   건설총괄부 계약번호 2017120AD92(`18.1.1)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인『서울지하철 9호선 3단계 시스템분야 전면책임감리용역』에 대한 용역변경계약(총차3회, 4차1회)을 다음과 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : *********************************

나. 용역개요 : 연장 9.14km, 정거장 8개 역사(931 ~ 938정거장)

- 위  치 : 송파구 종합운동장 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원앞)

- 범  위 : 지하철 9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 시설공사 책임감리

다. 용역업체 : 세종기술(주) 외 2개사 공동도급(분담이행방식)

라. 용역기간 : 총차 2015. 1. 5 ~ 2018. 12. 15 (4차 2018. 1. 1~2018.12.15)

마. 용역금액 : *********************************

바. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도 9호선 3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

사. 변경내용(용역기간 및 투입인력 : 변경없음)

- 총차3회

구 분		당 초	변 경	비 고
총 차	총용역비	***********	***********	**********
	ESC 1회	*	***********	**********
	ESC 2회	*	***********	**********

- 4차1회

구 분		당 초	변 경	비 고
4 차	총용역비	***********	***********	**********
	ESC 1회	*	***********	**********
	ESC 2회	*	***********	**********

아. 변경사유 : 물가변동(ESC 1,2회) 반영에 따른 계약금액 변경

붙임 : 1. 계약금액 변경 보고서 1부.

2. 용역 변경내역서(총차3회, 4차1회) 각1부.

3. 변경계약 합의서(총차3회, 4차1회) 각1부.

4. 물가변동(ESC1,2회) 조정 검토서 각1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	김병훈		송변전과장	代문학준		도시철도설비부장	02/28 구자훈
협조자	경리과장	최정수
시행	도시철도설비부-2034	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7123	/전송	02-772-7308	/	skbhoon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)