문서번호	시설보수과-1582
결재일자	2018.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장
이동섭	권순회	02/28 신동헌
협 조

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

공사재개 및 잔여공사 추진계획 보고

2018. 2

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

공사재개 및 잔여공사 추진계획 보고

동절기 일시 공사 중지된 「사천교 성능개선공사」재개에 따른 향후 잔여공사 추진계획을 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

○ 규    모 : 교량확장 폭30m→37m, 6차로→9차로(완료)

성능개선 폭 10m, 연장 90m, DB18→DB24(진행중)

○ 공사기간 : 2016. 4. 12 ~ 2018. 5. 30

○ 시 공 사 : 신안종합건설

○ 감 리 단 : ㈜한국건설관리공사, ㈜대한콘설탄트

○ 도 급 액 : 3,662백만원(1차 1,764백만원(준공), 2차 1,898백만원)

추진경위

○ 2016. 04 : 공사계약(총차, 1차) 및 1차 공사 착공

○ 2017. 04 : 2차 공사 계약 및 착공

○ 2017. 07 : 1차 공사 준공

○ 2017. 12 : 2차 공사 기성 및 잔여공사 예산 사고이월

○ 2018. 01 : 동절기 공사 일시 중지(~2월말)

<상부 전경>	<하부 전경>

2018년 공사 추진계획

○ 공사내용 : 사천교 성능개선 마무리 및 기존교량 바닥판보강

○ 공 사 비(이월예산) : 805백만원 (도급비 655, 관급비 150)

○ 공사기간 : 2018. 3. 2 ~ 5. 30 (3개월)

○ 주요 공사물량

- 기존교량(2교) 손상부 바닥판 보강(85.5㎡)

- 교면방수(985.5㎡) 및 아스콘 포장(42a)

- 신축이음장치 설치 (종방향 180m, 횡방향 116m)

- 기존교량(2교) 하부 콘크리트 표면보수 1,746㎡

- 기타 교통신호기 이설, 교량 하부 산책로 복구 및 정비 등

<주요 잔여공사 개략 공정표>

잔 여 공 종		3월				4월				5월
		1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
성능개선	교면방수/포장/횡조인트설치
	기존교량 바닥판 보강/양생
	보강부 교면방수/포장
	종조인트 설치
	하류측 연석/차량방호책 설치
	기존교량 보수 및 하부정비
	현장 정리 및 마무리

※ 장기공사 교통불편 민원을 감안한 공기 단축방안 및 현장여건을 고려한 최적 시공방안검토

○ 상기 보고내용과 같이 동절기 일시 중지 상태인 ‘사천교 성능개선공사’를 재개하여 잔여공사 추진코자 하며,

○ 동절기 축소 운영중인 감리단 인력투입을 정상화하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

향후계획

○ ‘18. 3월 : 공사재개

○ ‘18. 5월 : 사천교 성능개선공사 준공

첨부 : 1. 잔여공사 예정공정표(시공사) 1부.

2. 주요 잔여공종별 공사비 현황 1부.  끝.