문서번호	도시철도설비부-2007
결재일자	2018.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		송변전과장		도시철도설비부장
김병훈		서태창		02/28 구자훈
협 조

『서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 책임감리용역』

계약금액(총차3회,4차1회) 변경 보고

2018. 02.

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역』

계약금액(총차 3회,4차1회) 변경 보고

지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 책임감리용역에 대한 물가변동(ESC1,2회)으로 인한 계약금액을 변경하여 감리업무 수행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역

○ 과업위치 : 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원 앞)

○ 과업범위 : 9호선 연장건설(3단계) 사업구간 시스템분야 책임감리

- 연  장 9.14km, 정거장 8개소(변전실 3개소)

○ 계약현황 : 세종기술(주) 외 2개사 공동수급(분담이행방식)

구 분	용 역 기 간	계 약 금 액	비 고
****	*********************	***********
****	*********************	***********	준 공
****	**********************	***********	준 공
****	**********************	***********	준 공
****	**********************	***********	진행중

Ⅱ		추 진 경 위

○ 2015.11.26 : 준공기한 연기 및 감리투입인력 변경(총차1회 변경)

○ 2016. 5.19 : 물가변동(ESC 1,2회)으로 인한 감리비 사전검토 요청(본부→조달청)

○ 2016. 7.19 : 물가변동(ESC1회)으로 인한 감리비 조정검토의견서 송부(조달청→본부)

○ 2016. 7.26 : 물가변동(ESC2회)으로 인한 감리비 조정검토의견서 송부(조달청→본부)

○ 2017. 7.18 : 감리 투입인력 변경(총차2회 변경)

Ⅲ		계약변경 내용

○ 변경사유 : 물가변동으로 인한 감리용역비 조정 반영

○ 변경내용

- 총차 계약금액 변경[물가변동 조정(ESC 1,2회) 반영]

○ 물가변동 조정 현황

- ESC 1회 (2015.03.30.기준) : 첨부 참조

구 분	검토결과	비 고
계약체결일(직전조정일)	**********
조정기준일(비교시점)	**********
물가변동 대상 계약금액	***********
물가변동 적용 제외금액	***********
물가변동 적용금액	***********
물가변동 조정율	*****
물가변동 조정 금액	***********
조 정 후 감 리 비	***********

- ESC 2회 (2016.01.01.기준) : 첨부 참조

구 분	검토결과	비 고
계약체결일(직전조정일)	**********
조정기준일(비교시점)	**********
물가변동 대상 계약금액	***********
물가변동 적용 제외금액	***********
물가변동 적용금액	***********
물가변동 조정율	*****
물가변동 조정 금액	**********
조 정 후 감 리 비	***********

○ 변경현황 (용역기간 및 투입계획 : 변경없음)

- 총차

구 분		당 초	변 경	비 고
총 차	총용역비	***********	***********	**********
	ESC 1회	*	***********	**********
	ESC 2회	*	***********	**********

- 4차

구 분		당 초	변 경	비 고
4 차	총용역비	***********	***********	**********
	ESC 1회	*	***********	**********
	ESC 2회	*	***********	**********

Ⅳ		검 토 의 견

○ 서울지하철9호선 3단계 시스템분야 책임감리용역에 대한 물가변동(ESC 1,2회) 동시에 사전검토 실시후, 조달청 조정결과 반영을 위한 계약금액 변경은 대표 계약업체에 2018년 10월경 계약변경 예정으로 통보(2016년7월28일)

○ 상기와 같이 계약금액 변경을 2018년 10월경 하려고 하였으나, 계약업체로부터 조달청에 의뢰할 사전검토[물가변동(ESC 3회)] 서류가 접수되어, 사전검토 재요청 전에 물가변동(ESC 1,2회)을 반영한 계약금액(총차3회, 4차1회)을 변경 시행

Ⅴ		향 후 계 획

○ 용역 변경계약(총차3회, 4차1회) 의뢰(도철설비부→건설총괄부)

○ 물가변동(ESC 3회) 조달청 사전검토 재요청 의뢰(본부→조달청)

붙임 : 1. 변경계약 내역서(총차3회, 4차1회) 각1부.

2. 계약변경(총차3회, 4차1회) 요청문(감리단) 각1부.

3. 조달청 물가변동 조정검토서(1․2회) 각1부.

4. 물가변동으로 인한 감리비 조정 결과 통보문 1부.  끝.