		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(2018년 풍수해대책 추진계획 수립제출)

1.업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 쌍용건설(주)외 9개 현장

2.작 성 일 자 : 2018-03-02 15:03:45

3.지 시 내 용

1) 도시철도사업부-1910호(2018.2.27.), 방재시설부-1824호(2018.2.12.) 와 관련입니다.

2) 위 호와 관련하여 우리본부의 2018년 풍수해 안전대책 추진응 위하여 「도기본 풍수해대책 보완 추진사항」을 반영한 맞춤형 풍수해대책(계획)을 수립하여 주시기 바라며,

3)아울러 풍수해 계획읠 수립시 건설사업관리단의 1차검토 결과를 2018.3.7.까지 제출하여 2차검토 결과를 반영한 최종 검토 내용이 풍수해대책(계획)에 반영될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 맞춤형 풍수해대책 확인절차

풍수해대책수립 (시공사)		1차 검토 (건설사업관리단)		2차 검토 (발주기관)		검토내용반영 (시공사)
3.7까지		3.7까지		3.8까지		3.9까지

나. 세부 추진일정

- 풍수해대책 수립제출 : 2018. 3. 7까지(건설사업관리단 검토 결과)

- 1차점검 : 2018. 3. 23까지(해빙기점검, 기술지원감리원 점검, 일상점검, 특별점검 등이 있는 경우 점검 병행하여 실시)

※ 점 검 자 : 담당과장, 공사관리관, 기술지원건설사업기술자, 감리단장, 현장소장

※ 조치기간 : 2018. 2. 28 ~ 3. 25(경미한사항 즉시 현장조치)

※ 결과제출 : 2018. 3. 27까지

- 2차점검 : 2018. 4. 15까지(1차점검 결과를 중심으로 실시)

※ 점검자 : 부장, 담당과장, 공사관리관, 감리단장, 현장소장

※ 조치기간 : 2018. 4. 1 ~ 4. 20

※ 결과제출 : 2018. 4. 20까지

- 6월~9월중 점검 : 기술지원건설사업기술자 정기점검시 병행하여 실시

붙임 : 2018년 도기본 풍수해대책 보완사항 1부. 끝.

본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시    One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							신익현			신교통1과장					위성환					도시철도사업부장					03/02 박동룡
협조자
시행			도시철도사업부-2071									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스빌딩(9층)															/			WWW.seoul.go.kr
전화		02-772-7189						/전송			02-772-7305					/	caram00@seoul.go.kr												/	대시민공개