공사감독 일지
･ 현 장 : 세곡119안전센터 신축부지 ･ 기 간 : 2018. 2. 26. ~ 3. 2(25주)		감독공무원		팀장	과장
		김재원	신효인	오주형	03/05 최홍균
일자	확인사항
’18.2.26	① 직영2명 3층 청소 ② 미장공2명 2층 여자화장실 내벽 몰탈 ③ 방수4명 옥상 우레탄 방수작업 ④ 외부 패널공사 3명 전면 외벽 하지작업 ⑤ 기계공3명 급수급탕 배관작업 ⑥ 물탱크 2명 지하층 작업 ⑦ 장비 1대 반입
’18.2.27	① 직영2명 현장정리 및 청소작업 ② 미장공4명 창호주위 사춤미장 ③ 1층 화장실 내벽 몰탈 미장 ④ 방수공4명 지중층 우레탄 방수작업 ⑤ 토목공4명 옹벽 철근가공 및 기초터파기 ⑥ 외부 판넬 3명 하지철물 작업 ⑦ 기계공3명 3층위생 및 급수배관작업 ⑧ 장비 06대 기초터파기 작업
’18.2.28	① 직영2명 도로청소 및 현장정리 ② 미장공6명 1층 화장실 내벽 몰탈 작업 및 1,2층 창틀 주위 보강작업 ③ 잡철 5명 외벽 하지철물작업 ④ 창호주위 후레싱 하지작업 및 사워장 창문 틀 설치 ⑤ 토목공 6명 옹벽 철근가공 및 옹벽 기초형틀 작업 ⑥ 기계공 3명 3층 급수위생배관 설치 ⑦ 장비 06W 기초터파기 및 잔토상차 ⑧ 폐기물(페콘) 상차 및 25톤 덤프 2대 잔토 운반
’18.3.1	① 직영2명 현장정리 청소 ② 미장3명 지층 내벽 미장 ③ 방수3명 3층 화장실 방수 ④ 창호3명 자동문틀 설치 ⑤ 잡철6명 외벽하지 및 철물 창호주위 하지철물제작 ⑥ 수장11명 석고보드 및 스터드자재 반입
’18.3.2	① 직영2명 현장정리 청소 ② 미장6명 2층 탕틀 주위 사춤미장, 지붕층 보호몰탈 ③ 방수2명 지붕층 방수점검 ④ 창호3명 방화문틀 설치 ⑤ 잡철6명 외벽하지 및 철물 창호주위 하지철물제작 ⑥ 수장12명 1,2,3층 벽체 석고보드 및 스터드자재설치 ⑦ 장비25톤 자재 인양 ⑧ 기계공 3명 3층 위생배관 설치 ⑨ 토목공3명 옹벽 기초터파기 작업 ⑩ 포크레인 1대 기초터파기 및 잔토상차