투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	납품기한 연장 요청(슬러지건조시설 설치-레미콘)

우리센터에서 추진중인 “슬러지건조시설 설치사업”의 원활한 추진을 위해 아래와 같이 납품기한 연장을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 관급자재구매(슬러지건조시설 설치-레미콘)

2. 금    액 : 금19,852,320(일천구백팔십오만이천삼백이십원)

(조달수수료 별도 : 금101,840원)

3. 계약일자 : 2018. 2. 23.(계약번호 12171118500호)

4. 계약업체 : 서울,경인레미콘 협동조합 (대표 배조웅)

5. 계약방법 : 조달청3자단가

6. 납품기한

가. 당초 : 2018. 3. 15.

나. 변경 : 2018.12. 20.

7. 변경사유

가. 레미콘 구매물품의 특성상 일괄 납품받아 적치 후 사용 할 수 없는 관                  계로 사업의 공정별 진행상황에 따라 소요수량을 분할납품 받고자 함.

붙임. 1. 조달청 계약서 1부. 끝.

주무관	고두규		주무관	조연상		관리과장	03/05 윤문경
협조자
시행	관리과-2151	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화		/전송		/		/	부분공개(5)