문서번호	일자리경제과-9290
결재일자	2018.3.5.
공개여부	대시민공개

★주무관	청년지원담당		일자리경제과장		기획경제국장		부구청장		구청장
김영진	김현숙		임근수		권용대		손정수		03/05 김영배
협 조
						공공건축담당		이제관

청년문화창업공간「청년살이발전소」증축 ․ 운영 계획

2018. 2

성  북  구

[일자리경제과]

청년문화창업공간「청년살이발전소」증축 ․ 운영 계획

청년 실업난 해소 및 일자리 창출 위해 정릉시장내에서 창업을 꿈꾸는 청년들을 교육·지원하는「청년살이발전소」를 수평증축·운영하여 문화창업활동과 청년창업가 육성에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ 서울특별시 성북구 청년지원 기본 조례 제15조(시설의 설치 및 운영 등)

❍ 정릉시장 공영주차장 건립(변경) 계획(‘15.6.15, 구청장 방침)

❍ 정릉시장내「청년살이발전소」조성·운영계획(일자리경제과-15073, ‘16.04.06.)

□ 추진경위

❍ 청년 창업관련 성북구 청년정책 자문회의(‘17. 3. 22.)

❍ 청년 창업공간조성 관련 정릉시장 주변 활성화 계획(‘17. 5. 22. 구청장 방침)

❍ 청년살이발전소 운영계획 현안정책회의(‘17. 8. 14.)

Ⅱ		추진 방향

□ 추진방향

❍ 청년 창업활동 거점공간 육성 및 청년 네트워크 중심지역 기반 구축

❍ 청년 문화창업 활동공간 제공 및 지원을 통한 청년일자리 창출

❍ 지역대학, 민간단체 등 청년 다중지역 네트워킹 강화 통한 운영 확대

❍ 개울장, 청년장사꾼을 통한 지역경제 생태계 조성 및 전통시장 활성화

Ⅲ		사업 개요

□ 시설 현황

❍ 시 설 명 : 성북청년살이 발전소

❍ 위    치 : 성북구 정릉로 23길 56, 2층

❍ 시설규모 : 지상2층, 연면적 159.93㎡(48.4평)

층 별	시 설 명	면 적
1층	관리사무소(7.92㎡,2.3평), 공용화장실(15.48㎡,4.7평)	23.40㎡(7평)
2층	청년살이발전소(136.53㎡,41평), 테라스(64㎡,19평)	200.53㎡(60평)

❍ 운영현황

구 분	교육(사업)명	내 용
사무공간 운영	전통시장 청년상인 육성사업	전통시장 청년상인 창업활동 지원
	뉴딜일자리사업	2017 청년뉴딜일자리 사업 참여자 12명 근무 (지역아동센터 예술강사 파견, 청년예술단 운영)
교육장 대관	청년상인 창업지원 교육 등	상인공동체 활동지원 소통강의, 창업지원 및 협동조합 강의, 청년상인회운영 등
	주민공동체 활동 관련 모임 및 회의	정릉2동 마을기획단, 성북문화예술가협동조합 등 주민공동체 활동

□ 증축 개요

❍ 사업기간 : ’18. 2월 ~ ’18. 8월 (‘18.8월말 완료 예정)

❍ 증축규모 : 64.35㎡(약19평)

❍ 공간구성 : 창업활동 지원 및 교육공간 사업

❍ 운영방법 : 위  탁 (※성북문화재단 위탁)

❍ 사 업 비 : 총 387백만원 (전액 구비)

- 공  사  비(287) : 시설비(260),설계비(17),감리비(5),안전진단비(5)

- 자산취득비(100) : 가구 및 사무용품,집기,요리용품 등 구매(100)

❍  현장사진

청년 살이 발전소 전경	수평증축 64㎡(19평-2층 테라스)

Ⅳ		세부 추진계획

□ 공간조성

□ 증축계획

❍ 사업기간 : ‘18. 2월 ~ ’18. 8월 (‘18.8월말 완공 예정)

❍ 증축규모 : 64.35㎡ (약 19평)

<현재 2층 테라스를 청년 창업공간으로 조성 (64.35㎡ 수평증축)>
[변경전]	[변경후]

❍ 추진일정

사업 계획수립	⇒	청년창업 공간 조성 설계	⇒	계약심사 및 시공업체 선정	⇒	청년창업공간 조성 착공 (8월말 완공)	⇒	청년창업 지원사업 운영
’18. 02월		’18. 03~04월		’18. 05월		’18. 06~08월		’18. 09~12월

❍ 공간구성 ( ※공간구성은 의견수렴 및 공간설계 과정에서 조정 변경 가능)

면 적	공 간 구 성(안)		비고
198.35㎡ (60평)	커뮤니티레스토랑 (64.35㎡,19평)	요리창업교육,공공문화키친 문화교류공간	증축 부분
	문화복합공간 (108.08㎡,32.7평)	소규모미팅,창업프로그램진행	기존 공간
	상담소 및 사무실 (25.92㎡,7.8평)	창업정보교환, 상담프로그램 및 발전소 운영

□ 추진방법

❍ 공간 설계(공간기획 설계, 감리)

-「청년살이발전소」자문위원단 9명 구성·운영

‣ 설계용역 추진관련 발전소지원단 5명, 성북구 관계자 4명 구성

‣ 발전소 설계 및 증축공간 운영 관련 자문단 회의 실시 (3월 예정)

- 설계 경험 있는 업체 수의계약 : 커뮤니티공간 설계경험 있는 업체와 협의

‣자문을 통해 설계용역(수의계약)완료후 건물 증축공사 발주 및 준공

❍ 공간 조성

- 기본설계에 맞춰 건축, 공간구성 및 각종 시설물 제작, 설치 공사 실시

- 건물 증축 시공 : 전자공개 입찰 등(우리구 건축과 공공건축팀)

□ 공간운영

□ 위탁계획(안)

□ 운영방법 : 성북문화재단 위탁

□ 위탁기간 : ‘18. 08월 이후( ※증축공사 완료 후 협의)

□ 대상사무 : 시설의 운영,유지관리 및 사업전반에 관한 사무

□ 운영방향

□ 지역 네트워크와 공동체의 정보공유·협의위한 『커뮤니티 레스토랑』

□ 요리중심 창업교육과 문화교류 위한 오픈키친형태『공공문화키친』

□ 청년창업, 구직자들이 정보를 찾고 교환할 수 있는『프로젝트101』

□ 세부프로그램(안)

형태별		주요 활용내용
운영 프로 그램	청년 키친 LAB	청년 창업 레스토랑 운영, 요리 교육 (청년 셰프 및 청년매니저 육성, 청년상인)
	지역프로듀서 클레스	지역 대학생과 지역 청년이 함께 할 수 있는 문화교류 활동
	정릉청년약국	은둔형 외톨이, 니트 청년 등을 위한 상담, 교류 프로그램 운영

Ⅴ		사업 예산(안)

□ 총사업비 : 금 458백만원

□ 증축공사비 : 287백만원

- 시설비(260) 설계비(17) 감리비(5) 안전진단비(5)

□ 자산취득비 : 100백만원 (가구 및 사무용품, 집기 등 구매)

□ 일반운영비 : 70백만원(사무관리비, 공공운영비, 행사운영비 등)

□ 업무추진비 : 1백만원(청년지원센터 운영 활성화 위한 업무추진)

□ 예산과목

□ 일자리경제과, 지역경제육성, 청년일자리창출 및 자립기반 구축,

청년지원센터 설치·운영

Ⅵ		추진 일정

기간	주 요 항 목	추진주체
2월 중	∘ 청년살이발전소 증축․운영 계획 수립	성북구
	∘ 청년살이발전소 자문위원단 구성·운영	구,전문가,재단
3∼4월	∘ 설계업체 선정 및 증축 관련 절차 추진	※추진단 의견 반영
	∘ 청년살이발전소 성북 건축 설계 추진
5∼6월	∘ 청년살이발전소 공사발주 추진	성북구
	∘ 청년살이발전소 증축 프로그램 필요시설 구매
8월 말	∘ 청년살이발전소 증축 완료

Ⅶ		행정 사항

❍ 청년살이발전소자문위원단 구성 및 운영 : ‘18.02. ~ 완공시

❍ 건축과(공공건축팀) : 증축공사에 따른 공사시행, 관리감독 등

붙   임 :「청년살이발전소」자문위원단 구성 현황 1부.  끝.