문서번호	시설과-1172
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
허용석		이춘한	03/06 오임석
협조

서울랜드 분기변전소 교체공사 관련 정전 작업 계획

2018. 3.

서울대공원

(시설과)

서울랜드 분기변전소 교체공사 관련 정전 작업 계획

서울랜드 분기변전소 교체공사와 관련하여 야간 근무 및 정전 계획 일정을 보고 드림

□ 관련근거

○ 서울랜드 분기변전소 교체 계획 : 시설과-127(2018.1.8.)

□ 공사개요

○ 공사업체 : ㈜ 베스텍

○ 공사기한 : 2018.1.15.~4.20.

○ 공사내용

- 서울랜드 후문 분기변전소 외 8개소 교체

□ 정전작업 및 야간근무계획

○ 작업일시 : 2018.3.6.~3.30. 19:00~익일06:00

분기변전소명	작업일시	비고
T1(후문)	3.6. 19:00~06:00
T2(대극장),T2A(장터)	3.8. 19:00~06:00
T11(지구관),T11C(펌프장)	3.13. 19:00~06:00
T2B(카레원)	3.15. 19:00~06:00
T5B(우주전차)	3.20. 19:30~06:00	야간 폐장 시간 연장
T8A(킹바이킹)	3.22. 19:30~06:00	“
T6(관리동)	3.27. 19:30~06:00	“
전기사용전검사	3.30. 19:30~06:00	“

○ 근무인원 : 시설과 이춘한 외 3인(윤여경, 전성완, 허용석)

○ 근무내용 : 분기변전소 교체공사 감독

□ 향후계획

○ 관급자재 검수 및 공사 준공.  끝.