문서번호	건축부-3075
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		문화시설과장	건축부장
이진영		윤용훈	03/06 임인구
협조

『북한산성 대성문 해체·보수공사』

1차 공사 준공보고

2018. 3.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『북한산성 대성문 해체·보수공사』

1차 공사 준공 보고

『북한산성 대성문 해체·보수공사』의 1차수 공사준공 요청에 대한 검토 결과를 보고 드립니다.

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 성북구 정릉동 북한산성 대성문(사적 제162호)

○ 공사내용(해체·보수 범위)

- 문  루 : 바닥면적 35.24㎡, 높이 5.7m

- 육축부 : 높이 5.5m, 폭 12m, 너비 8m

○ 공사계약 현황

구 분	공사금액(천원)	공사기간	비 고
총 차	1,246,971,000	’17.2.28 ~ ’18.8.27
1 차	736,203,600	’17.2.28 ~ ’18.2.27	금회준공
2 차	510,767,400	’18.2.28 ~ ’18.8.27	시 행 중

○ 시공/감리 : 원택건설(주)+(주)세헌건설/(주)경복영건

Ⅱ		추진경위

○ 2017. 02. 28. : 공사착공(1차)

○ 2018. 02. 21. : 1회 설계변경(총차 및 1·2차 도급금액 변경)

○ 2018. 02. 26. : 총차 및 1·2차 변경계약

○ 2018. 02. 28. : 2차 공사착수

Ⅲ		준공검사 내용

□ 관련 근거

○ 원택대성문 제 2018-09호(2018.2.27.) “1차 공사 준공계 제출”

○ 대성문 감 제 170227호(2018.2.27.) “1차 준공계 검토의견서 제출”

□ 주요 검토내용

○ 계약금액 : 736,203,600원

○ 준공금액 : 736,203,600원

※ 퇴직공재부금 등 재경비는 1회 설계변경 계약 시 정산감액하여 반영

○ 문화재 감리원 검토의견

- 시공자가 제출한 ‘북한산성 대성문 해체·보수공사(장기계속 1차)의 준공계 검토결과 계약사항과 같이 준공되었다고 판단됨

Ⅳ		처리의견

○ 문화재 감리원 의견 및 준공계 검토 결과에 따라 건설총괄부에 통보하여 준공 처리코자 함.

붙임 : 1) 시공자 제출 준공계 및 준공관련 서류 1부.

2) 실시 및 예정공정표 1부.

3) 산업안전보건관리비 사용내역 1부.

4) 문화재 감리원 검토 의견서 1부.   끝.