문서번호	건축부-3097
결재일자	2018.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	의료시설과장	건축부장	시설국장
이정빈	이형재	임인구	03/06 류훈
협 조
	조경시설과장		신용우
	건축설비과장		김은덕
	서무과장		이인수

『종로구청·종로소방서 통합개발에 따른』

도시기반시설본부 청사확보 TF팀 구성·운영계획

2018. 3.

도시기반시설본부

(건  축  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	□

『종로구청·종로소방서 통합개발에 따른』

도시기반시설본부 청사확보 TF팀 구성·운영계획

종로구청 통합개발에 따른 도시기반시설본부(이하 ‘도기본’) 청사 확보의 효율적인 업무 추진을 위하여 실무 TF팀을 구성 및 운영하고자 함

□ 추진배경

○ 도기본 직원들의 안정된 근무환경 조성으로 직원 사기진작 및 임차청사 해소를 위해 종로구청·종로소방서 통합개발로 발생되는 여유공간을 도기본 청사로 활용

※『종로구청 통합개발에 따른 임대청사 해소를 위한 청사추진계획』(시장방침, ‘18.1.24)

○ 계획 단계부터 관련부서가 함께 참여하여 청사 확보의 효율적인 업무 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 종로구 종로1길 28(대지면적: 8,622.3㎡ 중 서울시지분 1,987㎡)

○ 규    모 : 지하4층/지상18층, 용적률 688%, 연면적 84,125.28㎡

총 계	종로소방서 등 공공청사	종 로 구
		소 계	구본청		구의회
			공공시설	임대시설
84,125	15,108 - 소방서 5,400㎡ 도기본 9,708㎡	69,017	46,254	20,431	2,332

※ 종로구 검토안으로 청사 확보면적은 추후 사업결정 협의과정(계약체결)에서 변경될 수 있음

○ 사업기간 : 2018 ~ 2022.12

○ 사 업 비 : 2,660억원 (추정)

※ 서울시 조달금액 : 463억원(종로소방서 166억원, 청사건립 297억원)

○ 사업추진 일정

타당성조사 용역 (종로구)		시 및 중앙 투자심사		공사시행관련 종합계약 체결 (서울시·종로구)		설계공모 및 설계용역		공사시행
‘17. 11 ~’18. 6		‘18. 6 ~ ’18. 8		‘18. 9		‘18. 9 ~ ’19. 12		‘20. 4 ~ ’22. 11

□ TF팀 구성·운영

○ TF팀 구성

- 운영기간 : 2018. 3. ~ 2022.12 (사업완료시 까지)

- 총 인 원 : 10 명

				총 괄 : 건 축 부 장
건설총괄부 (서무과)				건축부 (의료시설과)					설비부 (건축설비과)					방재시설부 (조경시설과)
과장	이인수			과장	이형재				과장	김은덕				과장	신용우
									담당	이강욱 이동훈
담당	김대하			담당	이정빈									담당	김달용
- 예산확보 절차 이행 · 투자심사(시 및 중앙) · 공유재산 심의 · 공유재산 관리계획 - 청사 확보면적 검토 - 실 용도 배치 및 용도별 필요 면적 검토				- 설계 및 공사감독 (건축) - 실 용도 배치 및 평면 설계 검토					- 설계 및 공사감독 (기계,전기)					- 설계 및 공사감독 (조경)

○ 운영계획

- 정기회의 : 월 1회 이상 (※ 필요시 종로구, 소방서 관계자 참석)

- 수시회의 : 기타 분야별 업무 조정 및 협의 필요시

□ 추진과제

○ 확보 가능한 청사 면적 및 실 용도별 필요 면적 검토․협의(종로구, 소방서)

- 도기본 입주 실 사무공간, 회의실, 서고, 창고, 체력단련장, 식당 등

- 소방서 비상상황실 공간 추가 확보 검토

○ 사업비(예산) 검토 및 예산확보 사전절차 이행 후 예산 반영(‘19년~)

- 타당성조사 용역(‘17.11.~’18.6, 종로구) 결과 검토

- 투자심사(종로구 협의), 공유재산 심의, 공유재산 관리계획 등 절차 이행

○ 공사시행 관련 종로구와 계약 체결 (투자심사 후)

- 도기본 배치 및 면적, 사업시행 방식, 공사부서, 사업비분담 등 반영

○ 설계공모 지침(과업내용서) 상 서울시 의견 반영

○ 기타 사업 진행과정 중 발생되는 현안사항 검토 협의