아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경에 따른 재계약 의뢰(2017~18년 광화문광장 제설작업용역(장기계속))

우리과에서 진행중인 『2017~18년 광화문광장 제설작업용역(장기계속)』이 설계변경 됨에 따라 재계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2017~18년 광화문광장 제설작업용역(장기계속)

나. 계약업체 : 상익공영(대표 *** ☏ 02-433-6112,*************)

다. 계약기간 : 2017. 11. 20. ~ 2018. 03. 20.

라. 계약금액 : 금33,894,000원(금삼천삼백팔십구만사천원정)

마. 설계변경 내역 및 사유

○ 변경내역 : 물량변경(총용역 계약금액은 변경없음)

제설작업 공종	수 량		증․감	비 고
	당초	변경
제설인력	1,344	1,402	증58
제설장비	2,66	157	감109

○ 변경사유 : 강설량에 따른 용역 물량 투입량의 변화

바. 예산과목 : 지속가능한 역사문화 도심구현, 역사도심 활성화, 광화문광장 관리운영, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 설계변경 및 용역 정산보고서, 설계변경 내역서 각 1부. 끝.

	역사도심재생과장
★주무관	김진기		광장관리팀장	한창옥		광화문광장기획반장	박상보		역사도심재생과장	03/06 양병현
협조자	계약1팀장	조현
시행	역사도심재생과-2742	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 신청사 10층 역사도심재생과 광화문광장기획반	/
전화	02-2133-7735	/전송	02-2133-0742	/	ggjjkk@seoul.go.kr	/	대시민공개