문서번호	정수시설과-1991
결재일자	2018.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		정수시설과장		영등포아리수정수센터소장
김기홍		유영춘		03/06 이성락
협 조
	기획예산과장				김형규

기계설비 유지보수공사(장기계속계약) 발주계획

2018. 3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

기계설비 유지보수공사(장기계속공사) 발주계획

우리 정수센터 기계설비의 효율적인 유지보수를 위해 연간단가 공사를 시행하여 정수생산 및 기계설비 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

1		관련근거

☐ 기전설비과-1150(2018.2.7.)호 : 2018년도 기전설비 유지보수(장기계속         계약) 추진계획 알림』

2		공사개요

☐ 취·정수장 기계설비 유지보수

○ 취수장, 1정수장, 2정수장, 고도정수 시설, 배출수 처리시설 내 펌프, 밸브,  호이스트 등 기계설비 유지보수(상세현황 붙임 참조)

- 고장설비 발생 시 연간단가 통한 즉시 보수

- 펌프 분해정비, 노후설비 수리 및 교체 등

3		추진계획

☐ 공사기간 : 착공일로부터 2019.3.31일까지(장기계속공사)

- 1차공사 : 착공일로부터 2018.12.31일까지

- 2차공사 : 2019.1.1.~ 2019.3.31일까지

☐ 소요예산 : 총차 220,000천원(1차:190,000천원, 2차:30,000천원)

- 원수및취수비 : 45,000천원(1차:45,000천원)

- 정수비 : 175,000천원(1차:145,000천원, 2차:30,000천원)

☐ 예산과목

- 원수및취수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비,수선유지비

- 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비,수선유지비

☐ 계약방법 : 제한경쟁(서울시 소재 기계설비공사업 또는 상하수도설비공사업        등록 업체)

4		향후 추진일정

☐ 2018. 03. 07. : 설계완료 및 설계심사 의뢰(본부 재무회계과)

☐ 2018. 03월 : 계약의뢰(본청 재무과), 계약 및 착공

☐ 2018. 06월 : 기성금 지급

☐ 2018. 12월 : 1차 공사 설계변경, 준공

☐ 2019. 01월 : 2차 공사 계약, 착공

☐ 2019. 03월 : 2차 공사 설계변경, 준공.  끝.

붙임 : 기계설비 현황 1부.  끝.