문서번호	토목부-3829
결재일자	2018.3.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	03/07 김영수
협조

사토 및 폐기물 운반관리시스템 관리비 반영 검토보고

(노들섬 특화공간 조성 토목공사)

2018. 3.

도시기반시설본부

(토  목  부)

사토 및 폐기물 운반관리시스템 관리비 반영 검토보고

[노들섬 특화공간 조성 토목공사]

우리 본부 중점추진사업으로 추진중인 사토 및 폐기물 운반관리시스템 (스마트송장)을 공사현장에 반영하고자 검토 보고드림

노들섬 특화공간 조성 토목공사

❍ 공사규모 : 옹벽보수공사 10,137㎡, 보도육교설치 B=3.5m, L=139m, 우수관 979m, 오수관 467m

❍ 도 급 비 : 금5,825백만원 (1차 : 금2,279백만원)

❍ 공사기간 : `17.11.15.~`18.12.31.(1차 : `17.11.15.~`18.4.10.)

❍ 시 공 사 : 신성종합건설(주) 외 2  ❍ 감 리 사 : ㈜아이티엠코퍼레이션

감리단 보고내용

❍ 대상 검토

- 연간 사토처리물량 4,000㎥이상 현장 : 해당

- 연간 건설폐기물 처리물량 2,000ton이상 현장 : 해당

❍ 수량 증감

공 종	단위	당초	변경	증·(△감)
토공사
스마트송장	㎥	-	15,362	증 15,362

- 토공사 내역수량 : 15,362㎥

· 사토처리(현장∼수도권매립지) 13,229㎥

· 반입토 (현장∼수도권매립지) 2,133㎥

❍ 단가 적용 검토 : 낙찰율(85.83%) 적용

- 스마트송장시스템 비용정산, 처리기준에 따라 사토운반 계약단가의 1.5% 적용

❍ 공사비 증감

- 전체                                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·(△감)
직접공사비	3,722,721	3,725,332	증 2,611
재 경 비	1,061,050	1,061,618	증 568
이 윤	387,619	387,870	증 251
한강100년 행사	124,840	124,840	-
공급가액	5,296,230	5,299,660	증 3,430
부가가치세	529,623	529,966	증 343
총공사비	5,825,853	5,829,626	증 3,773

- 1차                                                  (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·(△감)
직접공사비	1,484,255	1,486,866	증 2,611
재 경 비	423,596	424,164	증 568
이 윤	164,363	164,614	증 251
한강100년 행사	124,840	124,840	-
공급가액	2,197,054	2,200,484	증 3,430
부가가치세	219,705	220,048	증 343
총공사비	5,825,853	5,829,626	증 3,773

❍ 감리단 검토 의견

- 본 공사에 사토 및 폐기물운반시스템 관리비용 반영단가는 신규단가로 기존 낙찰단가의 운반비에 1.5%를 적용함은 적합하다고 사료됨

조치의견

❍ 감리단 검토의견과 같이 본 공사에 스마트송장시스템 반영하고 향후 설계변경시 정산처리하고자 함

붙임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.