문서번호	방재시설부-2897
결재일자	2018.3.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이민영		진재섭	03/08 이임섭
협조
	경리과장		최정수

-남부도로사업소 제설전진기지 조성공사-

준공기한연기 검토보고

2018. 3.

도시기반시설본부

(방재시설부)

-남부도로사업소 제설전진기지 조성공사-

준공기한연기 검토보고

「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사」감독기관(공단)이 제출한 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 준공기한 연기 검토보고서 제출(서울시설공단 공사감독1처-1091호 : ‘18.03.07.)

1		공사개요

□ 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사

□ 공사내용 : 부지조성 6,142㎡(장비보관소, 사무실, 창고 설치)

□ 계약금액 : 금2,136,233,000원(금이십일억삼천육백이십삼만삼천원정)

□ 공사기간 : 2017. 09. 13. ~ 2018. 03. 12.

□ 시 공 사 : 우륭건설주식회사외 1(감독기관 : 서울시설공단)

2		검토내용

□ 준공기한 연기사유

- 관할구청(서초구) 건축허가 및 부지경계 인접 저촉 잦나무 이식협의 지연

- 단지내 상수도관 인입관련 수도사업소 및 서초구 협의 지연

연번	현장여건에 따른 지연사유	지연일수	비고
1	건축허가 지연	27일
2	site1 수목14그루 간섭	26일
3	상수도인입 관련	27일
	총지연일수	80일

□ 준공기한 연장

구분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2017. 09. 13. ~ 2018. 03. 12.	2017. 09. 13. ~ 2018. 05. 31.	증80일

□ 연기에 따른 귀책소재 : 발주처

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

3		검토의견

□ 관할구청 건축허가 지연에 따른 실착공 지연 및 지장물(나무이식)이설과 수도사업소 등 유관기관 협의 지연에 대한 소요기간 반영건으로 공단에서 제출한 준공기한 연기 검토 보고서 검토 결과『적정』하다고 사료됨.

4		조치계획

□ 상기와 같이 준공기한 연기를 승인조치하여 공사시행에 만전을 기하고, 계약부서(건설총괄부)에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 공단 공문 1부.

2. 공단 보고서 1부.

3. 준공기한 연기원 1부.

4. 변경(예정) 공정표 1부.

5. 합의각서 1부. 끝.