문서번호	하천관리과-3487
결재일자	2018.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장
최병희	백성현	03/08 손경철
협 조

빗물펌프장 건설공사장 점검계획 보고

2018. 3.

하천관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

빗물펌프장 건설공사장 점검계획 보고

자치구에서 시행중인 빗물펌프장 건설공사장(5개소)에 대해, 우기전 펌프장 기능유지 및 안전사고 예방을 위해 시·자치구와 함께 현장점검을 아래와 같이 시행코자 함.

Ⅰ		점검개요

○ 점검대상 : 증설공사 시행중인 빗물펌프장 5개소

- 한남(용산구), 행당(성동구), 상수․당인(마포구), 염창1(강서구)

- ‘17년 사업 착수하여 현재 공정율은 25~45% 수준임.

○ 점검기간 : 2018. 3. 13. ~ 3. 21

구 분	주 소	점검일시	비 고
상수빗물펌프장	마포구 상수동 282	‘18. 3. 13. 14:00
당인빗물펌프장	마포구 당인동 1-10	‘18. 3. 13. 16:00
염창1빗물펌프장	강서구 양천로 67길 93-22	‘18. 3. 15. 15:00
행당빗물펌프장	성동구 살곶이길 313-62	‘18. 3. 19. 15:00
한남빗물펌프장	용산구 독서당로 6	‘18. 3. 21. 15:00

※ 점검일정은 현장상황에 따라 조정 될 수 있음.

○ 점검내용

- 우기전 기능유지를 위한 공정현황 및 향후 추진계획

- 공사장 가시설 등 시공상태 및 안전관리실태 등

Ⅱ		점검반 구성

○ 점검반 구성 : 시 · 자치구 합동(4명)

- 서 울 시 : 하천관리과 치수설비팀장 등 2명

- 자 치 구 : 치수과(물관리과) 치수팀장, 기전팀장 등 2명

Ⅲ		주요 점검사항

○ 우기전 빗물펌프장 기능유지을 위한 공정관리 및 현안사항 점검

- 공정계획서에 따른 추진실적(계획) 및 문제점 등 현안사항 점검

○ 자재 관리상태 및 공사장내 안전관리실태 등 점검

Ⅳ		점검결과 조치

○ 단순 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

○ 지적사항은 자치구에 통보하여 조치완료 후, 결과 제출

붙임 : 1) 안전점검 대상 공사장 현황 1부.

2) 점검표  1부.  끝.