투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(동북권사업단장)
(경유)
제목	업무 협조 요청 (창동역 고가하부 예술공방 조성공사)

1. 동북권사업단-11537(2017.11.23)호와 관련입니다.

2. 귀 본부의 공사의뢰에 따라 우리본부에서 긴급발주한 “창동역 고가하부 예술공방 조성공사”와 관련하여 제반 행정처리(가설건축물축조 허가 등), 고가하부 도로 선형변경 공사 미이행, 공사중 안전사고가 우려되는 사업지 주변 노점상 영업 등의 사유로 공사 착수가 지연되고 있으니 당해 공사가 실착공될수 있도록 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 공사 착수지연으로 인해 향후 공사기간이 연장 될 수 있음.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이정빈		의료시설과장	이형재		건축부장	03/08 임인구
협조자
시행	건축부-3254	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	ljbeen@seoul.go.kr	/	대시민공개