	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(신정중앙로등 9개노선 자전거도로 구축 용역)

1. 자전거정책과-1336(‘17.02.06) 및 자전거정책과-2439(’18.03.08)호  관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인『신정중앙로등 9개노선 자전거도로 구축 용역』에 대하여 다음과      같이 준공기한을 연기하고자 외뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 변경내용

용 역 명	신정중앙로등 9개노선 자전거도로 구축 용역
계 약 자	㈜서우티이씨 대 표 : 강 대 신
계약금액	일금88,900,000원
변경내역 (준공기한)	당 초	변 경
	2017.03.14. ~ 2018.03.08	2017.03.14. ~ 2018.03.28

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한연기 보고(연기의뢰서) 1부. 끝

	자전거정책과장
주무관	김영수		자전거시설팀장	한정환		자전거정책과장	03/08 김미정
협조자
시행	자전거정책과-2442	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동7층 (서소문동)	/
전화	02-2133-2767	/전송	02-2133-1057	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개