문서번호	토목부-3999
결재일자	2018.3.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	교량건설과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
권순환	박용택	김영수	류훈		03/09 김학진
협 조
	환경설비과장			여인웅

<천호대로(광나루역) 확장공사>

천호대로 상부 공공미술 작품 설치 시행 계획

2018. 03.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

<천호대로(광나루역) 확장공사>

천호대로 상부 공공미술 작품 설치 시행 계획

‘천호대호(광나루역) 확장공사’ 지하차도 상부에 설치되는 상징 조형물(공공미술 작품) 작품기획안 공모가 완료됨에 따라 작품설치  시행계획에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ				사업개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 위    치 : 광진구 아차산역 ~광나루역

○ 규    모 : 폭 6차로→10차로, 연장 900m (지하차도 580m)

중앙버스 전용차로 2,600m(정거장 5개소)

○ 사업기간 : ‘10.10 ~ ’18. 6

○ 총사업비 : 106,001백만원

○ 도 급 사 : 해동건설(주), 대보건설(주)

Ⅱ				공공미술 작품 개요 및 추진현황

○ 설치목적

- 상부 경관개선 공사와 연계하여 지역 랜드마크 이미지 형성이 가능한 전망대   기능을 겸한 상징조형물 설치

○ 사업예산 : 30억원(2017년 투자심사 완료)

○ 추진현황

- 2016. 9.       : 천호대로 지하차도 상부 경관개선 시행 방침 수립

- 2017. 2. ~ 7 : 공공미술 자문회의(본부 ⇔ 디자인정책과)

(자문요청, 현장방문, 작품선정 의뢰, 공모방법 결정 등)

- 2017. 8.~ 10 : 투자심사 절차이행(심사결과 : 적정)

- 2017.12.20. ~ 18.1.24. : 공공미술 작품기획안 공모(디자인정책과)

- 2018. 2. 2.   : 공공미술 작품기획안 심사 및 당선작 결정(조건부)

- 2018. 2.28.   : 공공미술 작품기획안 선정결과 알림(디자인정책과 → 본부)

Ⅲ				시행계획 검토

□ 실시설계 및 작품설치 시행

○ 천호대로 상부 공공미술 작품 기획안 공모 당선작이 결정됨에 따라 실시설계 조속 추진

▶ 용 역 명 : 천호대로 상부 공공미술 작품 설치 실시설계 용역

▶ 용역기간 : 착수일로부터 ~ 4월말

- 관련근거 : 천호대로 공공미술작품 기획안 공모계획(디자인정책과, ‘17.12.8.)

○ 공공미술 작품 당선작[제목 : 자라나는 숲(Growing Forest)]

산책로에서 바라본 풍경	산책로에서 바라본 야경

**************************************************

○ 실시설계 주요 과업내용

- 현장조사 및 검사(지반 조사 등)

- 작품 설계도면(도면, 구조계산, 내역서 시방서 등) 작성

- 각종 인․허가 등 행정절차 이행 및 협의

○ 상징조형물은 ‘천호대로(광나루역) 확장공사’ 상부 경관개선 꽃마루언덕 상부에 설치

- 엘리베이터 20인승 2대, 비상계단 1개소 포함)

▶ 공공미술 작품(상징조형물) 설치 위치

Ⅳ				추 진 방 안

□ 실시설계 및 작품설치 방안

구분	제1안	제2안
방 안	기존 도급에 포함 시행	별도 발주
장단점	신속하게 추진 공정관리 용이 하자책임 명확	절차 이행 등 시간 소요 공정관리 어려움 하자발생시 분쟁 우려

○ 공공미술 작품은 ‘천호대로(광나루역) 확장공사’ 상부 경관개선 공사구간에  설치되므로 경관개선 공사와 연계하여 설치가 필요하며, ‘18년 6월말 준공에 차질이 없도록 천호대로(광나루역) 확장공사에 포함하여 시행

- 지반조성, 경관개선 공사구간내 설치 등으로 공사중복, 하자분쟁 등 우려되므로 설계 및 시공을 기존 도급에 포함하여 시행

- 발주절차 이행, 적격심사, 계약, 착공까지 최소 1개월 이상 소요 예상

○ 실시설계는 공모계획에 따른 작품기획비를 도급비에 반영, 작품설치비는 실시설계 후 도급자와 협의하여 협의율을 적용하고 계약심사 결과에 따라 공사 변경계약 시행

*****************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅴ				향 후 계 획

○ 감리단 및 시공사에 통보하여 용역계약 및 설계작업 조속 시행토록 조치

○ 천호대로(광나루역) 확장공사에 포함하여 설계변경 시행

붙임 : 관련 공문 1부.  끝.