문서번호	급수운영과-4437
결재일자	2018.3.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
김용섭	김찬모	이병운		03/09 박영헌
협 조
	시설관리과장		김홍준

2018년 유수장애 상수도관 정비계획

2018. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2018년 유수장애 상수도관 정비계획

하수관에 저촉되는 상수도관을 이설하여 하수 흐름을 원활히 하고 상수도관의 부식 및 누수방지로 깨끗한 아리수 공급에 기여하고자 함

Ⅰ		관련 근거

❍ 상수도사업본부 누수방지과-2074(‘18.03.05.)호와 관련임.

- 2018년 유수장애 상수도관 정비계획

Ⅱ		2017년 추진실적

❍ 유수장애 정비실적

(단위: 개소)

구 분	계	급수운영과		시설관리과	비 고
		서대문구	마포구	은평구
계	7	-	-	7
정비	6	-	-	6
미 정비	1	-	-	1	굴착통제

Ⅲ		2018년 추진계획

정비 대상

❍ 정비 대상

(단위: 개소)

구 분			계	급수운영과		시설관리과	비고
				서대문구	마포구	은평구
계			6	-	1	5	-
정비 대상	사업소 원인자	하천관리과	1	-	1	-	-
		물재생계획과	4	-	-	4	-
		전년도 이월	1	-	-	1	-

❍ 정비대상 세부내역(6건)                                     (단위: 개소)

연번	관할구	위 치	유수장애 상수도관 현황	하수관거 규모	비 고
계
1	마포구	노고산동 31-123 ~ 신정동 한강 합류점	D=400	봉원천
2	은평구	녹번동 136-32	D=100mm*0.8m	Φ1200
3	은평구	녹번동 155-39	D=50mm*0.45m	Φ450
4	은평구	수색동 146-1	D=200mm*1.5m	□2.4×1.6
5	은평구	수색동 146-1	D=200mm*1.5m	□2.4×1.6
6	은평구	수색동 146-1	D=200mm*1.5m	□2.4×1.6	전년도 이월

정비 기간 : 연중 실시

○ 정비대상에 대하여 자치구 및 유관기관 등과 합동 조사를 실시하여 5월말(우기 도래       전)까지 정비 완료(예산 조기집행)

○ 자치구에서 하수도 탐사 등으로 추가 발견되는 정비대상은 예산 한도 내에서 당해        연도에 정비하고 예산 부족 시 2019년에 정비

정비 예산액 : 30,000천원

Ⅳ		정비내용 및 방법

○ 하수도 내부에 부설된 유수장애 상수도관 이설

○ 하수도내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

○ 이설공간이 협소한 경우에는 별도 관망형성 등 정비방안 수립하여 절단

○ 자치구에서 통보된 유수장애 상수도관은 현장조사 후 확인하여 정비

○ 귀책사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수 후 상수도관 이설 및 정비

Ⅴ		행정 사항

○ 3월 이후 당월 추진 실적을 익월 10일(매월)까지 본부 보고

- 정비완료 후 해당 자치구에 통보하고 대장 및 관리카드를 정리하여 제출

- 자치구에서 추가 통보되는 대상이 있을 경우 월보에 포함하여 제출

붙임 : 1. 2018년 유수장애 상수도관 정비대상 1부.

2. 추진실적 보고(양식) 1부.  끝.