문서번호	시설관리과-6801
결재일자	2018.3.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이용민	박행종	03/09 최명익

설계변경(최종) 심의위원회 개최결과 보고

2018. 3.

동부수도사업소

설계변경 심의위원회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 **********외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 시공물량 증,감 사항이 발생됨에 따라 설계변경에 앞서 설계변경(최종) 심의위원회를 개최하여 심의를 완료하고 결과를 보고합니다.

Ⅰ		설계변경 개요

❍ 공 사 명 : ********** 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 공사개요 :  당초 D=13~300mm, L=1,303m

변경 D=13~300mm, L=1,631m(증 328m)

❍ 공사기간 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 6월 30일

(총부기기간 : 2017년 4월 10일 ~ 2018년 6월 30일)

❍ 도 급 비

구 분		금 액		증ㆍ감(원)	비 고
		당 초(원)	변 경(원)
총 공 사 비		***********	***********	************
도급비	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************

❍ 도 급 자 : ***************

Ⅱ		심 의 개 최

❍ 심의일시 : 2018년 3월 8일(목) 17:30~

❍ 심의장소 : 3층 소회의실

❍ 심의위원

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 시설관리과(*****************************

급수운영과********************

Ⅲ		심 의 내 용

❍ 계약물량 증,감에 대한 설계변경 사항으로

가. 신규공종 산출 적정여부

나. 설계변경 사항 타당여부

다. 변경물량 및 단가 적용 등의 적정여부

라. 관련규정 및 적정성 여부

Ⅳ		심 의 결 과

❍ 신규공종 산출 적정여부 : 적 정

❍ 설계변경 사항 타당여부 : 적 정

❍ 변경물량 및 단가 적용 등의 적정여부 : 적 정

❍ 관련규정 및 적정성 여부 : 적 정

첨부 : 심의개최 및 의견서 1부.  끝.