투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	공사기한 변경요청(봉화황평분교)_4차

1. 시설과-465(‘18.3.9)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하고 있는 『봉화황평분교 가족자연체험시설 전기공사』 준공기한을 아래와 같이 변경코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

공사기한 변경요청 내용

❍ 준공기간 변경

- 당  초 : 2017.10.26.~ 2018.03.12.

- 변  경 : 2017.10.26.~ 2018.03.26.

❍ 연기사유

- 현재 전기공사가 30%의 공정을 진행하고 있으며, 현장실정 반영한 변경사항(3상수전 ← 단상수전, 교사동화장실 천정형방열기 전원공급방식 변경)과 시공사(우진건설)의 체납상태에서 현장근로자 노무비 지급방식(대금e바로 시스템)이 확인돼 잔여공정 추진을 위한 최소공기연장 필요

❍ 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 : 미부과

붙 임 : 1. 공사기한 변경 검토보고  1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설관리팀장	장창원		시설과장	03/09 代송복식
협조자
시행	시설과-466	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	부분공개(6)