문서번호	도로관리과-3918
결재일자	2018.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
최현		김근용	03/09 박문희
협조

동공탐사용역 공정회의(17-3단계) 결과 보고

2018. 3.

서울특별시 도로관리과

동공탐사용역 공정회의(17-3단계) 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’18. 3. 8(목) 16:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 도로관리과 회의실

○ 안    건 : 2017-3단계(2월 실적)

○ 참    석 : 도로관리과장, 도로굴착관리팀장, 업무담당

○ 발    표 : 광성지엠(PM 하성호, 장일호, 강상윤)

□ 추진실적

○ 탐사실적(’18.2.28 기준)

구분	연장(㎞)			동공(개)				목표 동공	비고
	계획	탐사	분석	분석	제척(GPR)	천공	발견
3단계	466	466	466	672	261	411	349	246

※ 목표동공 246개 보다 103개 초과 달성

□ 공정회의 주요내용

○ 추가과업(흙의 유실속도 실험, 굴착복구 구간 시험탐사) 시행시 안전사고 예방 철저

- 교통통제 작업시 ‘안전관리대책’ 및 ‘경찰서 신고’ 내용을 준수하여 교통을 통제하고 작업장 안전 확보 후 실시

- 천공작업시 발생되는 천공수 처리 등 동절기 현장관리 철저

○ 발견동공도 전체 수량에 포함하여 제출

○ 흙의 유실속도 실험 관련

- 하수도가 인접한 동공실험시 색소 등으로 물의 흐름추적 관찰

○ PPT 자료에 발견동공 등급별, 자치구별 현황을 추가

○ 최종보고회 및 준공준비 철저

- 종합보고서 등 성과품은 준공 20일전까지 제출하여 검토 후 인쇄

붙임 : 보고자료 1부.(별도)  끝.