	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기의뢰

1. 주거환경개선과-2475(2018.3.9.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 *************************************에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 준공기한 변경내역

용역명	용역업체 (대표)	계약금액 (천원)	준공기한 연기
			당 초	변 경
**********************************	**** ***** *****	*******	‘17.7.21~ ‘18.3.18	‘17.7.21~ ‘18.4.30

나. 준공기한 연기 사유 : 별첨 방침서 참조

붙임 : 1) 준공기한 연기 방침서 1부

2) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3) 관련공문(합의각서, 공정표). 각 1부

4) 추가과업내용서 1부. 끝.

	주거환경개선과장
주무관	이동호		주거환경사업팀장	김지환		주거환경개선과장	03/09 유철호
협조자
시행	주거환경개선과-2461	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 4층	/
전화	02-2133-7257	/전송	02-2133-0753	/	2004ho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)