아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(어르신복지과장)
(경유)
제목	2018년 예산 재배정 요청 등(시립중랑노인전문요양원 증축공사)

1. 어르신복지과-19284(2017.10.13.)호 및 우리 본부 건축부-17418(2017.10.12.)호와 관련추정사업비(입찰-계약금액)를 통지하오니 연차별 예산확보로 계획 일정에 따라 사업이 완료 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

2. ****************************** 재배정 요청하오니 재배정해 주시고  계속공사에 따른 연차별 공사기간 확보와 원활한 공사시행을 위한 관급자재 발주 비용이 부족하므로 시설비(공사비)를 추가로 사용할 수 있도록 확보하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : ****************

나. 재배정 요청액 내역

(단위 : 천원)

****	구 분	********	*****		이월예산 (기 재배정)	2019년 필요예산	입찰(계약금액)
			건 축 부	설 비 부
****		1********	844****	*******	2*******4	2,812,000	6,954,748
*** **** ****	*** (공사비)	1********	534,000	*******	2*****104	2,374,000	6,001,112
	***	300****	300,000	0	*******	258,000	753,636
	** ***	1*****	10,000	0	*	180,000	200,000

****************************************************

- 종전: 총 사업비 6,841, 공사비 5,547, 설계·감리비 844, 시설부대비 450(단위: 백만원)

************************************************

- 변경: 총 사업비 7,282, 공사비 6,001, 설계·감리비(설계292, 공모35, 감리754) 1,081, 시설부대비 200(단위: 백만원)

★ 사유: 2015년 대비 2017년 12월, 2018년 공사발주로 인건비, 재료비 인상

다. 예산과목

- 어르신 복지 수준향상 및 장사시설 운영내실화, 치매어르신 지원강화, 어르신 복지시설 설치지원, 시설비(100-401-01) 등.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	문성재		의료시설과장	이형재		건축부장	전결 03/12 임인구
협조자
시행	건축부-3360	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2616	/전송	02-3708-2659	/	msj2061@seoul.go.kr	/	부분공개(5)