문서번호	산악구조대-748
결재일자	2018.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★담당자	지대장	산악구조대장		119특수구조단장
조성훈	박태성	이재홍		03/12 최성희
협 조
	행정지원과장		김장군
	담당자		김수재

도봉산 산악구조대 청사 보수⋅ 보강 공사 계획

2018. 3.

119특수구조단

(산악구조대)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

도봉산 산악구조대 청사 보수⋅보강 공사 계획

산악구조대 환경특성에 따른 하우스형 컨테이너 청사를 운영함에 있어 장비

보관 창고 부족 및 쾌적한 직장분위기 조성을 위한 청사 보수⋅보강 공사 계획임.

Ⅰ		관 련 근 거

행정지원과-509(2018.1.11.)호 “2018년도 세출예산 운영계획 알림”

행정지원과-10(2018.1.2.)호 “2018년도 소방안전특별회계 예산편성 결과 알림”

Ⅱ		현 실 태

도봉산 산악구조대 청사 준공년도: 2014년 5월

특수구조대 청사 이전에 따른 장비 보관 창고 부족 및  렉산 노후에 따른 기능 상실

청사(컨테이너) 노후에 따른 사무실 및 대기실 바닥・벽 누수 보수 공사 등

현장사진

Ⅲ		예산현황

소요예산: 금35,500천원(금삼천오백오십만원)

예산과목: 특수구조단 운영/산악구조대 운영/시설비(401-01)

Ⅳ		사업내용

공 사 명: 도봉산 산악구조대 청사 보수⋅보강 공사

공사위치: 도봉산 산악구조대 청사(서울특별시 도봉구 도봉산길 86-2)

공사범위: 창고(12㎡) 증축 및 렉산 보수보강, 사무실・대기실 바닥 및 벽 보수 등

공 사 기 간: 공사착공일로부터 29일 이내

현장안전관리: 도봉산산악구조대 지대장 감독하에 시공업체 관리자 현장안전관리

현장안전조치: 용접기 사용 등의 공사장 안전관리(건축법, 근로안전관리규정,

보건관리규정 및 사내보험법 등) 관계법규 준수토록 조치

Ⅴ		향후추진계획

세부추진일정

단 계		일 정		주 요 내 용
관계기관 협의 및 허가 승인		1~2월 중		◦공사에 따른 관련법령 등 사전조사 ◦관계기관 협의 및 허가사항 승인 등
⇩
사전조사		3월 중		◦공사를 위한 사전조사 및 시장조사
⇩
계약 체결 및 공사 착공		3월 중		◦공사 계약 체결 ◦공사 착공 및 공사감독공무원 지정
⇩
공사 준공 및 대금 지급		4~5월 중		◦공사 준공검사 ◦대금 지급

※ 관계행정기관 협의 및 허가승인 등

○ 도봉구청(건축과): 가설건축물 증축 신고 완료

⇒ 도봉구청 건축과-3614(2018.02.26.)『공용건축물(가설건축물)              축조신고(공용협의) 변경 처리 알림』

○ 환경부, 국립공원관리공단(도봉사무소): 가설건축물 설치 협의 완료.  끝.