문서번호	토목부-4116
결재일자	2018.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김동수	안규홍	김영수		03/12 류훈
협 조

-탄천변 동측도로 확장 실시설계 용역-

실시설계 변경(제4차) 및 5차분(1구간) 계약추진

2018. 3.

서울특별시 도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

-탄천변 동측도로 확장 실시설계 용역-

실시설계 변경(제4차) 및 5차분(1구간) 계약추진

‘탄천변 동측도로 확장 실시설계 용역’  실시설계 변경(총차분 - 4차) 및 차수계약(5차 - 1구간)을 추진하고자 보고 드림.

1	관련근거

○ 탄천변 동측도로 구조개선사업 추진계획 [도로계획과-1654(2017.2.2.)호 행정2부시장]

○ 설계용역(5차분) 계약체결 요청 [도로계획과-560(′18.1.12.)]

○ 행정2부시장방침 제2013-349호 (지장물 조사를 위한 줄파기 병행 실시)

2	용역개요

○ 위    치 : 송파구 삼성교 북단 ~ 올림픽훼밀리아파트

○ 규    모 : 도로확장 (폭 왕복 4~6차로, 연장 4.9㎞)

- 1구간(광평교~올림픽훼미리아파트) : 폭6차로, 연장 0.6㎞

- 2구간(삼성교~광평교) : 폭4~6차로, 연장 4.3㎞

○ 용역기간 : 2008. 12. 31. ~ 2018. 12. 31.

○ 용역금액 : 총차 4,157,241,000원 (2018년 설계비 - 10억 원)

○ 설 계 사 : ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링

3	주요 추진경위

○ '08.12.31. : 실시설계 용역 계약

○ '10. 2.11. : 실시설계 용역착수 (용역기간 : '08.12.31.~'10.3.5.)

○ '10. 2.28. : 1차분 준공

○ '10. 3. 5. : 2차분 착수 (용역기간 : '10.3.5.~'11.3.5.)

○ '10.10.27. : 용역기한 1차 연기 ('10.03.05. → '11.12.31.)

○ '11. 9.23. : 용역기한 2차 연기 ('11.12.31. → '12.10.31.)

○ '12.10.26. : 용역기한 3차 연기 ('12.10.31. → '13.10.31.)

○ '13.10.22. : 설계용역(총차분, 2차분) 용역기한 4차 연기 ('13.10.31. → '14.10.31.)

○ '14. 9. 3. : 설계용역(총차분, 2차분) 용역기한 5차 연기 ('14.10.31. → '15.10.31.)

○ '15.10.30. : 설계용역(총차분, 2차분) 용역기한 6차 연기 ('15.10.31. → '16.6.30.)

○ '16. 4.15. : 설계용역 설계변경(총차분 제1회) 및 3차분(타당성조사 및 기본계획) 시행,

용역기한 7차 연기 ('16.6.30. → '16.12.30.)

※ 3차분 계약 (타당성조사 및 기본계획 – 도로계획과에서 추진)

○ '16.12.19. : 설계용역(총차분, 3차분) 용역기한 8차 연기 ('16.12.30. → '17.3.31.)

○ '17. 3.10. : 설계용역 변경계약 의뢰 (도로계획과 → 토목부)

○ '17. 3.14. : 설계용역 설계변경 (총차분 제2회)

○ '17. 3.20. : 용역 계약기간 변경 요청 (도로계획과 → 토목부)

○ '17. 3.22. : 설계용역 설계변경 (총차분 제3회) 및 용역기한 8차 연기 ('17.3.31. → '18.12.31.)

○ '17. 3.30. : 실시설계용역(3차분) 준공

○ '17. 4.23. : 실시설계용역(4차분) 계약

○ '17. 4.24. : 1구간(광평교~올림픽훼미리아파트) 실시설계(4차분) 착수

○ '17.10.25. : 실시설계용역 연기요청 (도로계획과 → 토목부)

○ '17.10.27. : 실시설계용역(4차분) 용역기한 연기

- 준공기한 연기 : 2017.4.14. ~ 2018.03.31.까지

○ '17.12.19. : 실시설계(4차분) 준공

○ '18. 1.12. : 설계용역(5차분) 계약체결 요청 (도로계획과 → 토목부)

- 용역금액 : 5차분 1,000,000천원

- 계약기간 : 계약일로부터 2018.12.31.까지

○ '18. 3. 2. : 신규공종 발생에 따른 설계변경 검토요청 (토목부 → 도로계획과)

- 변경금액(총차 4회) : 용역금액  총차 4,157,241천원 → 4,172,372천원 (증 15,131천원)

○ '18. 3. 6. : 계약금액 조정 검토의견 회신 (토목부 → 도로계획과)

3	추진방안

○ 행정2부시장방침 제2013-349호에 의거 지장물 조사를 위한 줄파기 병행 실시를 위한 신규공종 설계에 반영 (당초계약 누락)

○ 설계변경(총차분) - 4회 설계변경

- 사업규모                                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	변경사유
구 간	광평교 ~ 삼성교	올림픽훼밀리아파트 ~ 삼성교		단순오기 수정
규 모	폭 4~6차로, 연장 4.9㎞	변경없음
계약금액	4,157,241,000	4,172,372,000	증)15,131,000	신규공종 반영
계약기간	2008.12.31. ~ 2018.12.31.	변경없음

- 신규공종 발생내역 : 지장물 횡단줄파기 및 GPR탐사

구 분	구 간	수 량	단 위	비 고
1. GPR탐사 계획	1, 2구간	1	건	지하차도설치구간
2. GPR탐사	1구간	3	개소	지하차도 구간(시·종점부), 동남로
	2구간	1	개소	지하차도 구간 1개소
3. 횡단줄파기	1구간	24	m	8m/개소당 - 3개소
	2구간	3	m	3m/개소당 - 1개소
4. 횡줄파기(토공 15m)	1구간	10	m	왕복4차로 구간
	2구간	5	m
5. 지하매설물 조사 복구비	1구간	3	개소
	2구간	1	개소

○ 차수계약(5차분)

- 용역개요                                                       (단위 : 원)

구 분	내 역	비 고
구 간	광평교 ~ 올림픽훼밀리아파트
규 모	폭 4~6차로, 연장 0.6㎞
계약금액	1,000,000,000
계약기간	2018. 3. ~ 2018. 12. 31.

4	조치의견

○ 상기와 같이 실시설계(총차-4회)와 차수계약(5차분)에 신규공종을 반영하여 설계변경 및 차수계약을 추진하여 사업시행에 만전을 기하고자 함

5	향후 추진계획

○ 2018.  3. 14. : 설계변경 및 차수계약

○ 2018. 12. 31. : 용역 준공

붙임 : 1. 설계용역(5차분) 계약체결 요청

2. 설계변경(총차분 4회) 내역서 및 차수계약(5차분) 내역서 1부.  끝.