＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 사업 관급자재 납품기간 변경 시행

우리 본부에서 시행하고 있는 ‘서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 사업’ 에 사용되는 관급자재를 아래와 같이 납품기한을 변경코자 합니다.

1. 계약현황

❍ 건   명 : 서울숲-뚝도정수센터 간 교환부지 공원조성 사업 관급자재 납품기한 변경

❍ 구매내역 : 식물매트 등 18종

❍ 계약업체 : 우리꽃연구소 등 6개업체

2. 변경내용

❍ 조달구매 자재 : 식물매트 등 18종

❍ 납품기한 변경

- 당  초 : 2018.3.15

- 변  경 : 2018.3.25

❍ 변경사유 : 현장 여건 변경으로 공사기간 연장에 따른 관급자재 납품기간 연기

❍ 물량변경 : 없음

3. 예산과목

❍ 최고품질의아리수생산, 깨끗하고안전한아리수생산, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(뚝도정수센터서울숲간교환부지공원조성공사)

따로붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 물품 내역서 1부.  끝.

주무관	한광수		생산관리과장	한희선		생산부장	03/13 유성종
협조자	주무관	정남숙
시행	생산관리과-2637	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개