문서번호	시설관리과-7369
결재일자	2018.3.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
기전팀장		시설관리과장		동부수도사업소장
정인주		최명익		03/14 이구석
협 조
	주무관				박기련
	주무관				채규성

“마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2018년 상수도관 전기방식공사 추진계획

2018. 3.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	자치구 4개구, 성동도로사업소
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2018년 상수도관 전기방식공사 추진계획

상수도관(D=700mm 이상) 전기방식공사 및 기존 시설물에 대한 보완공사를 시행하여 부식으로 인한 누수사고를 사전에 예방하고 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

○ 전식방지시설 현황 : 총 58개소

- 희생양극 25개소, 전기방식 33개소(외부전원 28, 배류기 5)

□ 2018년 사업계획

○ 사업대상 조정 (5건 → 4건)

○ 조정사유 : 2018년 도로굴착 통제구간 보류 및 배수관 전식에 의한 누수구간 상수도관로(제기동) 우선시행

구 분		전식구간 (도면번호)	관로구경(D), 방식구간(L)	조정결과	비 고
당초	광진구	군자교~아차산역 (E-AB-15)	D=1,350mm L=2,727m	2018년 신설
	성동구	군자교~이화교	D=1,650mm L=2,372m	시설보완 시행 (양극공 신설)	하천점용허가대상
	중랑구	장평교~묵동교 (E-AB-33)	D=1,000mm L=5,117m	2018년 신설
	동대문구	장위사거리~이문동 삼익아파트(A-057)	D=1,200mm L=2,034m	보류('18년 도로굴착통제 허가불가)	'19년 이후
	중랑구	장평교~묵동교 (E-AB-34)	D=1,000mm L=5,117m	보류(사업비 부족)	'19년 이후
대체	동대문구	제기동 852-2 (A-063-1)	D=1,200mm L= 2,140m	'17년 전식누수 구간 우선시행

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 상수도관 전기방식 공사

○ 사업기간 : 2018. 3.~10.

○ 사 업 비 : 740백만원 (감리비 70백만원 포함)

○ 사업규모 : 4개소 (신설 구간 3개소, 전위미달 양극공 시설보완 1개소)

□ 세부추진계획

○ 2018년도 상수도관 전기방식 공사 2건 발주시행

- 공사규모(4개소 4개구)에 대해 연간 절대공기가 부족하고 타기관 업무협의(교통통제) 및 현장 접근성 등을 고려하여 인접한 자치구별로 구분시행

□ 계약방법 (공통) : 제한경쟁입찰 (지역제한)

- 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 면허 소지자로서 법인 등기부상 본점이 서울시에 소재한 업체

□ 총 공사비 : 金 670백만원 (폐기물 처리비 및 도로 복구비 등 포함)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 상수도관 전식방지공사,

시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

① 건 명 : 2018년 성동·광진구 상수도관 전기방식 공사

- 공사기간 : 착공일로부터 150일

- 사업내용

‣ 정류기 및 정션(Junction)박스 신설 및 정비 2개소, 측정함 설치 2개소

‣ 양극공 보링 및 양극매설 7개소, 기타 전기공사 1식

② 건 명 : 2018년 동대문·중랑구 상수도관 전기방식 공사

- 공사기간 : 착공일로부터 150일

- 사업내용

‣ 정류기 및 정션(Junction)박스 신설 2개소, 측정함 설치 2개소

‣ 양극공 보링 및 양극매설 8개소, 기타 전기공사 1식

○ 상수도관 전기방식공사 감리용역

□ 계약방법 (공통) : 제한경쟁입찰 (지역제한)

- 입찰참가자격 : 전력기술관리법 제14조에 따른 전력종합감리업 또는 전력전문감리업 등록업체로서 법인 등기부상 본점이 서울시에 소재한 업체

□ 총 감리비 : 金 70백만원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 상수도관 전식방지공사,

시설비 및 부대비, 감리비(401-02)

① 건 명  : 2018년 성동·광진구 상수도관 전기방식공사 감리용역

- 용역기간 : 착공일로부터 160일

② 건 명  : 2018년 동대문·중랑구 상수도관 전기방식공사 감리용역

- 용역기간 : 착공일로부터 160일

○ 상수도관 전기방식공사 건설폐기물 처리

- 건    명 : 2018년 상수도관 전기방식공사 건설폐기물 처리

- 예상발생량 : 약 200톤(폐아스콘)

- 처리방법 : 중랑·동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역에 반영조치

- 소요예산 : 약 10백만원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 상수도관 전식방지공사,

시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

○ 기타 추진사항

- 도로굴착, 하천점용허가 신청 및 굴착복구비 납부

- 도로시설물(정류기반 등) 점용허가 신청

- 전기방식시설물 전기사용 신청 및 시설분담금 납부

- 소요예산 : 약 60백만원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 상수도관 전식방지공사,

시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 향후일정

○ 2018. 3. : 전기방식공사 계약심사 및 감리용역 타당성 심사(본청)

○ 2018. 4. : 전기방식공사 및 감리용역 계약 및 발주

○ 2018. 5.~10. : 자재확보, 전기방식공사 및 감리용역 준공

붙  임 : 1. 전식방지시설 현황 1부.

2. 본부 2018년 전기방식사업 추진계획 1부. 끝.