투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강남구 논현로 419 PMK빌딩 9층 (주)펨코엔지니어링 대료 김수호 귀하
(경유)
제목	건설사업관리기술자 배치변경 승인요청 건 재검토 통보(시립중랑노인전문요양원 증축)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. PC18-182(2018. 3. 8.)호와 관련입니다.

2. 귀 사가 요청하신 건설사업관리기술자 배치 변경 및 투입 승인요청 건을 검토한 결과 「건설기술 진흥법 시행령」제60조(건설사업관리기술자의 배치)에 의하여 예정공정에 따라 상주하는 분야별 건설사업관리기술자 배치가 원칙이나, 공정과 맞지 아니하게 조경기술자가 배치되어 있어 배치변경이 부적합 하니 재검토 하여 주시고, 향후 공사지연 등으로 인·월수 및 배치기간이 증가되는 사례가 없도록 공정관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 상주 건설사업관리기술자 배치계획 변경

구분	분야	변경 전	변경 후	비 고
상주	건축	2018. 5.19.~ 2019. 7.17.	2018. 3.10.~ 2019. 7.17.	공정에 따른 분야별 건설사업관리 기술자 배치 부적합
	조경	2019. 3.15.~ 2019. 7. 2.	2019. 5.31.~ 2019. 7. 2.
공사기간: 2017. 12. 20.~ 2019. 6. 19.(18개월)

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	문성재		의료시설과장	이형재		건축부장	전결 03/14 임인구
협조자
시행	건축부-3535	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2616	/전송	02-3708-2659	/	msj2061@seoul.go.kr	/	부분공개(5)