문서번호	현장민원과-5377
결재일자	2018.3.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	동부수도사업소장
나윤정		정남기	03/15 이구석
협 조
	주무관			이종린

「신내건영2차아파트」

공용급수관 교체공사 완공상태 검사 보고

2018. 3.

동부수도사업소

(현장민원과)

「신내건영2차아파트」

공용급수관 교체공사 완공상태 검사 보고

신내건영2차아파트 공용급수관 교체공사 완료보고서를 제출함에 따라,

시공연장 실측, 준공도면, 준공내역서 등을 바탕으로 완공상태를 검사하고

적정 공사비 지원에 대하여 검토 보고드림.

□ 공사 현황

○ 공사위치 :*******************

○ 세 대 수 : 14개동 1113세대

○ 도 급 인 : ******************

○ 수 급 인 : ****************

○ 계약금액 : 금1,003,805천원(부가세 포함)

○ 시공감리 : ***************

○ 공사규모 : 교체 D=15 ~ 200㎜, L=5,622m

○ 계약내용

- 공사명 : 노후 급수배관 교체 및 부스터펌프 설치공사

- 공사기간 : ’17. 11. 1. ~  ’18. 2. 28.

□ 공용급수관 교체공사 완료에 따른 검사

○ 검 사 일 : 2018년  3월 13일 (화) 14:30~16:00

- 단지내 주수도계량기 이후 공용급수관 교체완료 확인

○ 검 사 자 : ********************

○ 입 회 자 : ***************

**************

**************

□ 공사 연장 실측

○계약연장 : 6,077m,  실측연장 : 5,622m

연장 구경	계약 (m)	실측 (m)	증감(m)
	교체	교체
15mm	1403	918	감 485
20mm	134	175	증 41
25mm	372	351	감 21
32mm	464	415	감 49
40mm	580	535	감 45
50mm	1,929	1,985	증 56
65mm	313	315	증 2
80mm	304	276	감 28
100mm	24	44	증 20
125mm	106	129	증 23
150mm	329	373	증 44
200mm	119	106	감 13
계	6,077	5,622	감 455

- 실측결과 총연장은 5,622m로서 당초 보다 455m 감되었음.

- 주 수도계량기실, 세대별 계량기실, 기계실 배관 용접부 및 세대별

공사 부분 확인

□ 공종별 내역 검토

○ 준공내역 검토

(단위:원)

품 명		설계금액		준공금액		증감금액	비 고
1. 장비설치공사		79,400,000		79,400,000		-	미인정 400,000원 (방열기 설치는 배관교체 공사와 관련이 없는 공종이므로 공사지원금액에서 제외)
	-전기방열기 설치		400,000		400,000
2. 옥외급수 배관공사		39,603,698		56,213,382		증 16,609,684	공사경로 및 물량변경으로 공사금액 증감
3. 기계실 배관공사		71,832,012		71,963,657		증 131,645
4. 옥내급수 배관공사		517,914,699		519,017,096		증 1,102,397
5. 철거공사		29,667,428		28,733,631		감 933,797
6. 소화배관공사		21,582,163		19,917,459		감 1,664,704
합 계		760,000,000		775,245,225		증 15,245,225

□ 준공 원가계산서 검토 : 별첨

○ 제비율 적정 여부 검토 : 적정

※ 검토 기준 : 조달청 2017년 원가계산 적용기준 적용

□ 총공사비 산출

○ 배관교체 공사비  : 1,014,588천원

(장비설치 공사 중 전기방열기 재료비, 노무비를 제외한 금액)

○ 설계 · 감리비 :     17,400천원

총       계   : 1,031,988천원

□ 공용급수관 교체공사 지원금 검토

○ 공사금액의 80%(가)  : 825,590천원

- 공사금액의 80% 이내 : 1,031,988천원 × 0.8 =825,590천원

○ 표준지원공사비(나)    : 445,200,000원

- 400천원 × 1113세대 = 445,200,000원

○ 공사비 지원 가능금액 (㉮ > ㉯) : 445,200,000원

- 실제소요공사비의 80%와 표준공사비를 비교후 적은금액으로 지원

□ 검사결과

○ ********* 옥내 공용급수관 공사완료에 따른 현장 실측 및          준공상태를 검사한 결과 이상 없음.

○ 준공내역서, 준공도면, 준공사진 등 검토 결과 적정하다고 사료됨.

○ 이에 따라, 옥내 공용급수관 교체공사 지원금을 검토한 바, 장비설치 공사 중 전기 방열기 설치는 지원대상이 아니므로 이를 제외하고 산출한 총공사비와 옥내 공용급수관 교체공사비 지원가능금액을 비교하여 적은금액인 445,200,000원을 지원 하고자 함.

붙 임 : 공사원가 계산내역 및 준공사진 1부.  끝.