문서번호	급수운영과-5916
결재일자	2018.3.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
박준성		김남구	03/15 김정수
협 조
	시설관리과장			고신석
	시설관리팀장			문병희
	주무관			박성자

2018년 유수장애 상수도관 정비계획

2018. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

2018년 유수장애 상수도관 정비계획

하수관내에 저촉된 상수도관을 이설하여 하수 흐름을 원활히 하고 상수도관을 안전하게 관리하여 깨끗한 아리수 공급에 기여하고자 함

1		관련 근거

❍ 하수도법 제24조, 제80조 제4항 제4호

❍ 하수도법 제19조 제5항, 제75조 제2호

2		2017년 추진실적

❍ 유수장애 정비실적

(단위: 개소)

구 분	정비목표			정비실적			추진률 (%)	미정비
	계	강서구	구로구	합계	강서구	구로구
대 상	6	3	3	3	0	3	50	3

※ 미정비(3건)은 대규모 단수가 수반되며, 공간협소(2건) 및 하수도 귀책(1건)으로 이설 불가 및 불필요함

❍ 예산집행

–예산액 : 30,000천원

–집행액 : 26,390천원 (집행률 : 87.9%)

3		2018년 추진계획

정비 대상

❍ 유수장애 정비대상

(단위: 개소)

구 분	정 비 목 표
	계	강서구	구로구	전년도 이월
대 상	8	1	4	3

❍ 예산 배정액 : 30,000천원

정비 기간 : 연중 실시

○ 정비대상에 대하여 자치구 및 유관기관 등과 합동 조사를 실시하여 5월말(우기 도래 전)까지 정비 완료(예산 조기집행)

○ 자치구에서 하수도 탐사 등으로 추가 발견되는 정비대상은 예산 한도 내에서 당해 연도에 정비하고 예산 부족 시 2019년에 정비

4		정비내용 및 방법

○ 하수도 내부에 부설된 유수장애 상수도관 이설

○ 하수도 내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

- 하수박스 내 횡단 상수도관은 절단· 철거하여 유수장애 해소

○ 이설공간이 협소한 경우에는 별도 관망형성 등 정비방안 수립하여 추진

○ 자치구에서 통보된 유수장애 상수도관은 현장조사 후 확인하여 정비

○ 귀책사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수 후 상수도관 이설 및 정비

추진일정

○ 현장조사 및 공사 추진방법 모색 : 3월말 까지

○ 도로굴착 승인 및 유관기관 협의 : 3월 ~ 4월

○ 작업지시 및 공사시행 ⇒ 4월 ~ 5월

5		행정 사항

○ 추진실적 보고 : 본부 누수방지과 매월 10일 한

- 정비완료 후 해당 자치구에 통보하고 대장 및 관리카드를 정리하여 제출

- 자치구에서 추가 통보되는 대상이 있을 경우 월보에 포함하여 제출

붙임 : 1. 2018년 유수장애 상수도관 정비대상 1부.

2. 추진실적 보고(양식) 1부.  끝.