문서번호	시설보수과-2015
결재일자	2018.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
이동섭		권순회	03/15 신동헌
협조

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

관급자재 수량조정 및 추가구매 검토보고

2018. 3

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

관급자재 수량조정 및 추가구매 검토보고

사천교 성능개선공사와 관련하여 건설사업관리단으로부터 현장 여건을 반영한 관급자재 수량조정 및 추가구매 요청사항에 대한 검토 보고임.

감리단 보고사항

(1) 확장교량 보도부 아스콘 추가 포장 검토

- 사천18-01(‘18.1.3), 사천교 잔여공사 주요공종 시공방안 검토 보고

▸ 보도부 배수불량 조치 등을 위한 아스콘 추가포장 검토

(2) 점토블록 추가 구매

- 사천18-16(‘18.2.28), 관급자재(점토블럭) 추가구매 요청

(3) 종방향 조인트 제품 변경(NLJ조인트 → NMC조인트)

- 사천18-20(‘18.3.7), 종방향 조인트 적용성 비교검토 보고

▸ 동일 성능의 내구성 추가 확보가 가능한 조달 우수제품 적용

보고내용 검토

○ 보도 아스콘 추가 포장 검토

- 당초 설계(안) : 슬래브 상면 도막형 바닥재 설치

- 현장 적용(안) : 슬래브 상면 아스콘 추가 포설(t=4㎝)

※ 현재 슬래브 상면과 인접 보도구간 단차 발생으로 교대 조인트 물고임 발생이 예상되므로, 원활한 배수처리를 위하여 아스콘 추가 포설 후 도막형바닥재 시공 마감 처리코자 함

▸ 아스콘 추가 구매 : 약51톤 (증 3,032천원)

<인접보도 단차>

○ 점토블록 추가 구매 검토

- 교량 하부 기존 보도블록 구간 중 공사중 손상이 많이 발생된 구간(346㎡)을 추가 정비하여 환경개선 및 시민불편 해소를 위하여 점토블록 추가구매 설치코자 함

▸ 점토블록 추가 구매 : 약13,166매 (증 8,472천원)

○ 종방향 조인트 제품 검토

- 당초 설계(안) : New Longitudinal Joint

- 현장 적용(안) : New Monocell(No.30) Joint

▸ 현장 여건 상 중차량 반복 하중 상재 시 내구성을 확보할 수 있는 동종 제품 계열 중 시공 사례가 많고 경계적인 조달 우수제품으로 시공하여 시설물의 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

※ 당초 예산 사고이월을 위하여 기 구매한 신축이음 수량 322m 중 일부 구매 취소하고, 상기 종조인트 신규 구매(3자단가)코자 함

▸ 기존 신축이음 수량변경 : 322m → 121m (감 67,622천원)

▸ 신축이음 신규구매 : 180m (증 55,800천원)

<관급자재 변동내역(총괄)>

구 분	수 량		관급비 증·감	비 고
	당 초	변 경
아스콘	459톤	510톤	증) 3,032,000	증)51톤
점토블록	-	13,166매	증) 8,472,000	신규
신축이음장치	322m	121m	감) 67,622,000	감)201m
신축이음장치	-	180m	증) 55,800,000	신규
계			318,000	잔액

조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 사천교 성능개선공사 시행 중 소요되는 관급자재 변경 및 추가 구매하여 시공품질 관리에 만전을 기하고자 함.