문서번호	토목부-4354
결재일자	2018.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
권순환	박용택	전결 03/15 김영수

설계변경(전체 1회, 1차 2회) 검토보고

≪장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사 건설사업관리용역≫

2018.03.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경(전체 1회, 1차 2회)검토보고

≪장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사 건설사업관리용역≫

‘장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사 건설사업관리용역’ 의 설계변경 요청에 대하여 검토 보고드림.

【근거】동일(감리) 제18-567호(‘18.03.09.) : 건설사업관리용역 변경설계서(전제1회, 1차 2회) 제출

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사 건설사업관리용역

○ 계약금액 : 1,628,800천원 (1차 : 500,000천원)

○ 계약기간 : ’17.05.10. ~ ’20.06.22. (1차 : ’17.05.10 ∼ ’18.03.25)

○ 계 약 자 : ㈜동일기술공사 외 2개사

□ 보고 내용(설계변경)

○ (전체) 건설사업관리 기술자 투입인원 조정

- 물가변동 조정금액 반영에 따른 변경

- 건설사업관리기술자 휴일근무대가 정산에 따른 변경

- 계약금액 및 계약기간 변경 현황

(단위 : 천원)

구분		당초	변경	증·△감	비고
총괄	계약금액	1,628,800	1,628,800	변동없음
	계약기간	2017.05.10. ~ 2020.06.22	2017.05.10. ~ 2020.06.22	변동없음

- 투입인원 변경 현황 (전체 1회)

구분	단위	당초	변경	증·감
특급기술자	인·월	44.84	44.84	-
고급기술자	인·월	34.40	28.13	-6.27
중급기술자	인·월	24.65	24.65	-
기술지원	인·월	17.30	16.26	-1.04
합계		121.19	113.88	-7.31

○ (1차) 건설사업관리 기술자 투입인원 및 계약기간 조정

- 물가변동 조정금액 반영에 따른 변경

- 건설사업관리기술자 휴일근무대가 정산에 따른 변경

- 계약금액 및 계약기간 변경 현황

(단위 : 천원)

구분		당초	변경	증·△감	비고
1차 2회	계약금액	500,000	500,000	변동없음
	계약기간	2017.05.10. ~ 2018.03.25	2017.05.10. ~ 2018.03.21	△4일

- 투입인원 변경 현황 (1차 2회)

구분	단위	당초	변경	증·감
특급기술자	인·월	12.22	12.11	-0.11
고급기술자	인·월	6.13	6.04	-0.09
중급기술자	인·월	13.55	13.26	-0.29
기술지원	인·월	5.31	5.22	-0.09
합계		37.21	36.63	-0.58

□ 조치의견

○ 상기와 같이 ‘장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사 건설사업관리용역’에 대해 설계변경하여 감리업무에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙  임 : 1) 건설사업관리용역 설계변경 요청 공문 1 부.

2) 변경설계서 및 합의각서 1 부.  끝.