투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조달청장(예산사업관리과장)
(경유)
제목	물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토의뢰 [서울지하철9호선3단계 920공구 건설공사]

우리 본부에서 시행하고 있는『서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사』는  기획재정부에서 관리하는 총사업비 관리대상 공사로써『총사업비 관리지침』에 의거 물가변동으로 인한 총사업비를 조정하고자 따로 붙임과 같이 사전 검토를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철9호선3단계 920공구 건설공사

나. 공사기간 : ‘09.12.31. ～ ‘18.12.31.

다. 계약금액 : 157,561,856,000원

라. 물가변동 적용내용(5회)

1) 계약금액          : 157,561,856,000원

2) 비적용 대상금액   : 138,968,214,155원

3) 물가변동 적용대가 :   18,593,641,845원

4) 지수 조정율       : 3.58%

5) 물가변동 경과기간 : ‘14.09.01. ~ ‘17.09.30.(1,124일)

6) 선금급 공제액     : 120,235,000원

7) 실 조정금액       : 545,417,000원

따로붙임 : 물가변동(5회) 검토자료 1부.(별도송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	엄상민		토목1과장	윤방식		도시철도토목부장	03/15 이도헌
협조자	주무관	임경태		주무관	김용선
시행	도시철도토목부-3065	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스9층	/
전화	772-7214	/전송	772-7306	/		/	대시민공개