투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행［한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역］

『한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역』에 대해 다음과 같이 설계변경(2회) 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역

나. 용역기간 : 2017.3.16 ∼ 2018.3.31

다. 계약금액 : 262,245,000원

마. 계 약 자 : ㈜케이지엔지니어링종합건축사사무소 대표  천병희

바. 설계 변경내용

(1) 도급비 변경                                             (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
도급비	262,245,000	275,050,000	12,805,000

- 설계변경 사유 : 건설사업관리자 투입일수 조정에 따른 변경

(2) 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비고
준공기한	2017.3.16~2018.3.31	2017.3.16~2018.4.10	10일 연기

- 연기사유 : 금년 한파로 인한 한강(샛강) 결빙으로 여의샛강 하상정비 및 수상운반이 어려워 당초 예정 공정보다 15일정도 늦어져 공사 관리 감독을 위한 투입일수 변경에 따른 준공기한(10일)을 연기

- 귀채소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

사. 예산과목

- 깨끗하고 안전한 한강만들기, 한강하천시설관리, 한강저수로정비, 감리비

- 깨끗한 물관리, 한강수질개선, 잠실상수원퇴적물준설, 감리비

- 치수및하천관리,하천복원및정비,한강관광자원화,시설비

(여의샛강 유지유량확보사업 2017년 국비)-증액금액 12,805,000

붙임   1. 변경설계서 1부.

2. 건설사업관리자 투입계획 변경 등 검토 보고서 1부

3. 건설사업관리자 투입일수 검토 서류 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.

5. 합의각서 1부.   끝.

	시설부장
주무관	김근섭		치수과장	신용철		시설부장	전결 03/15 최진석
협조자	주무관	김동식		주무관	심옥경		기획예산과장	김건태
총무과장	박병현
시행	치수과-1013	(		)	접수		(		)
우	04770	서울 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 시설부	/
전화	02)3780-0651	/전송	02)3780-0744	/	kgs727@seoul.go.kr	/	대시민공개