문서번호	교량안전과-4566
결재일자	2018.3.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		유제천	03/16 代박동욱
협조

‘18년도 교량점검시설 정비사업 발주계획 보고

2018. 3.

교량안전과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘18년 교량점검시설 정비사업 발주계획 보고

한강교량·일반교량 및 고가차도의 교량점검시설 정비를 통한 교량점검의 효율성 향상 및 점검자의 안전을 확보하기 위해 추진하는 “2018년도 교량점검시설 정비공사” 의 발주 계획을 보고 드림

Ⅰ		관련근거 및 사업개요

가. 관련근거

○ 교량점검시설 정비계획 (교량안전과-10141, ‘17.06.07)

○ 교량점검시설 개선 (‘18년도 교량안전과업무보고, ‘18.02)

나. 사업개요

○ 대    상 : 구리암사대교 외 20개 교량

구 분	교량수	교 량 명	비 고
점검통로 설치	6	잠실,영동,성수,올림픽, 금천교, 신정교	물품구매 (현장설치도)
출입계단 및 사다리설치	20	구리암사, 광진, 천호, 올림픽, 잠실철교, 잠실, 영동, 성수, 동호, 반포, 동작, 한강, 원효, 서강, 가양, 신정교, 숯내교, 보라매고가, 도림천고가, 서해안연결램프	공사발주

○ 총사업비 : 1,153,100천원

○ 사업기간 : 착수일로부터 180일

○ 현황사진

신정교 본선 P12 (점검통로 설치대상)	영동대교 P9 (출입계단 설치대상)

Ⅱ		사업 발주 계획

가. 출입계단 및 점검사다리 설치공사

○ 입찰방식 : 제한경쟁(실적제한)

○ 입찰자격

- 건설산업기본법에 의한 금속구조물․창호공사업 등록업체로서 공고일 기준 최근 10년이내 교량안전점검시설 설치 실적(준공검사가 완료된 1개회사 1건의 공사실적)이 100m이상인 업체

- 지역의무 공동도급(공동이행방식)대상 공사이므로 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자를 반드시 구성원으로 하여야 하며 지역업체의 시공참여비율은 49%이상.

- 공동수급체의 구성원수는 대표사 포함 2개사 이내로 하여야 하고, 대표자는 출자비율(지분)이 많은 업체.(구성원별 최소 계약참여 최소지분율 5%이상)

○ 공사개요

- 출입계단 설치 : 20개교량 57개소, 415.67m

- 점검사다리 설치 :  6개교량 28개소, 86.7m

○ 공사기간 : 착공일로부터 180일

○ 소요예산 : 960,050천원

나. 점검통로 물품구매

○ 발주방법 : 조달청 구매 의뢰

○ 계약방법 : 다수공급자 계약

․ 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준 (조달청고시 2017-27호, 2017. 10. 30)

※ 중소기업자간 경쟁제품 1억 이상인 경우 5인 이상의 계약상대자를 대상으로 제안 요청

○ 납품업체 선정 기준 : 가격 (최저가격)

○ 인도조건 : 현장설치도

○ 납품기한 : 착수일로부터 120일

○ 2단계 경쟁 대상업체 : 현장설치도 12개업체 중 가격순 5개업체 선정

○ 구매수량 : 점검통로 6개교량 30개소 489.4m

○ 소요예산 : 172,215천원

- 물품대금 : 171,290,000원 (489.4m×350천원/m)

- 조달수수료 :    924,960원 (171,290,000원×0.54%)

Ⅲ		향후계획

○ 2018. 3.   계약심사

○ 2018. 3.   공사발주

○ 2018. 4.   계약 및 착공

○ 2018. 9.   공사 준공.

붙임 : 1. 출입계단,사다리 설치대상 조사표 1부.

2. 점검통로 설치대상 조사표 1부.

3. 조달청 등록 교량점검시설 등록업체 현황 1부. 끝.