위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	경원선 월계~녹천 철도이설사업 공사기간 연장 협의 회신

1.  한국철도시설공단 수도권사업단-4069(2018.03.15.)호 관련입니다.

2. 『경원선 월계~녹천 철도이설사업』 공사기간 연장 협의에 대하여 아래와 같이 회신하오니, 사업추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 공사기간 연장

- 당초 : 2009.10.19. ~ 2018.03.30.

- 변경 : 2009.10.19. ~ 2018.11.30.

나. 검토의견 : 붙임

다. 협의조건 : 본 사업 길내기 2구간 지장물(한라공업사, 고물상의 일부저촉) 철거를 위한 행정대집행 계고 등의 절차 협의 및 미집행 도로 길내기 등 조속완료.

3. 아울러, 도시기반시설본부 토목부에서는 동부간선도로 확장(월계1교~녹천교) 공사와 관련하여 업무에 반영하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 사업기간 연장 요청 공문(한국철도시설공단) 1부

2. 사업기간 연장 검토서(한국철도시설공단) 1부

3. 세부검토 의견서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),한국철도시설공단이사장
주무관	김선배		도로시설계획팀장	양돈욱		도로계획과장	03/16 하종현
협조자
시행	도로계획과-3526	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층 안전총괄과 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8025	/전송	02-2133-0762	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다