문서번호	시설과-1428
결재일자	2018.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
전성완	이춘한	전결 03/16 오임석
협 조
	주무관		조대복
	주무관		이재균

황새마을 전기‧기계설비 공사

준공기한 연기 검토 보고

2018. 3.

서울대공원

(시 설 과)

황새마을 전기‧기계설비 공사

준공기한 연기 검토 보고

황새마을 시설개선 전기‧기계설비 공사 시행중 건축 선행공사 준공기한 연기에 따른 검토 보고임

1		관련근거

○ 『황새마을(작은물새장)』시설개선공사 준공기한 연기 검토 보고

(시설과-1412, 2018.3.15.)

2		사업개요

(단위 : 원)

구 분	계 약 명	공사(용역)기간	계약금액	계약업체	사 업 내 용
전기공사	서울대공원 황새마을 시설개선 전기공사	2017.10.23 ~ 2018.3.31	85,855,000	㈜대웅파워텍	분전반 교체 및 어닝 전원공사 전등, 전열설비 공사 등
전기공사 감리용역	서울대공원 황새마을 시설개선 전기공사 감리용역	2017.11.2. ~ 2018.3.31	10,128,000	신한전설(주)	전기공사 감리용역 1식
기계공사	서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사	2017.10.19 ~ 2018.3.31	116,064,000	자연엔지니어링(주)	위생배관 및 난방공사 1식 기계실 장비 설치 등

3		준공기한 연기 검토

○ 선행 건축공사 시행중 추가공사(조경석 쌓기) 등으로 인해 절대       공기가 부족하여 공사기간이 30일 연장되었고

○ 현장조사 결과 건축 내외부 마감, 그물망 설치 등의 공정이 진행       되지 않아 분전반 설치, 전기배관 입선 및 바닥 난방‧위생배관        등의 시공(마감)이 불가함에 따라 후속 전기, 기계공사의 공기        연장이 필요함

○ 준공기한 연기 내용

구 분	계 약 명	계약자	공사(용역) 기간		비고
			변 경 전	변 경 후
전기공사	서울대공원 황새마을 시설개선 전기공사	㈜대웅파워텍 대표 이숙경	2017.10.23 ~ 2018.3.31	2017.10.23 ~ 2018.4.30	30일 연장
전기공사 감리용역	서울대공원 황새마을 시설개선 전기공사 감리용역	신한전설(주) 대표 최광일	2017.11.2. ~ 2018.3.31	2017.11.2. ~ 2018.4.30
기계공사	서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사	자연엔지니어링(주) 대표 김순영	2017.10.19 ~ 2018.3.31	2017.10.19 ~ 2018.4.30

○ 지체상금 부과여부: 미부과

○ 공사금액: 변경없음

4		처리의견

○ 공사진행 상황 등 종합적으로 검토한 바 준공기한을 선행 건축공사       일정에 맞춰 30일 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

5		행정사항

○ 공사 및 용역 변경계약 의뢰.  끝.