공사감독일지
소방행정과-4104		감독공무원		팀장		과장
･ 공사명 : 세곡119안전센터 신축공사		김재원	신효인	오주형		03/19 최홍균
･ 기 간 : 2018. 3. 12. ~ 3. 16(27주)
일자	확인사항		비 고(근로자 201명)
’18.3.12	① 직영2명 현장청소 ② 조적2명 적벽돌, 콘크리트벽돌, 레미탈 양중 및 쌍기 ③ 외단열6명 1층 차고 메시작업 및 외부 보드부착 ④ 도장2명 3층 퍼티 및 수성 1차 도색작업 ⑤ 수장6명 3층 천정석고보드 및 텍스시공 ⑥ 창호2명 스텐레스문틀 설치 ⑦ 유리4명 2층 유리끼우기 ⑧ 토콕4명 옹벽기초콘크리트 타설 ⑨ 기계3명 덕트설치 ⑩ 장비펌프카 1대 크레인 1대 반입 작업 ⑪창호2명 2~3층 코너바 수정 중				현장근로자 32명
’18.3.13	① 직영2명 각층 청소작업 ② 조적5명 체력단련장 외부 적벽돌 쌍기 ③ 미장4명 3층 내벽미장 ④ 수장공7명 1층 스터디 및 2층 천정M바 및 텍스시공 ⑤ 도장2명 3층 퍼티작업 및 수성페인트 시공 ⑥ 창호2명 알루미늄 창틀수정 ⑦ 외단열7명 외부 보드부착 및 내부 메시작업 ⑧ 유리4명 유리끼우기 및 내부 실리콘 작업 ⑨ 잡철8명 외부판넬 설치 하지작업 ⑩ 잡철3명 3층 방화문샷터 설치 ⑪ 토목4명 옹벽 기초형틀설치 및 되뫼우기 ⑫ 기계2명 급수보온				현장근로자 50명
’18.3.14	① 직영2명 각층 청소작업 ② 조적5명 체력단련장 외부 적벽돌 쌍기 ③ 미장4명 3층 내벽미장 ④ 수장공7명 1층 스터디 및 2층 천정M바 및 텍스시공 ⑤ 도장2명 3층 퍼티작업 및 수성페인트 시공 ⑥ 창호2명 알루미늄 창틀수정 ⑦ 외단열7명 외부 보드부착 및 내부 메시작업 ⑧ 유리4명 유리끼우기 및 내부 실리콘 작업 ⑨ 잡철8명 외부판넬 설치 하지작업 ⑩ 잡철3명 3층 방화문샷터 설치 ⑪ 토목4명 옹벽 기초형틀설치 및 되뫼우기 ⑫ 기계2명 급수보온 작업				현장근로자 50명
’18.3.15	① 직영2명 정원 양수작업 및 현장정리 ② 수장6명 2층 대기실 천정 시공 ③ 타일5명 1,2층 화장실 벽 타일 시공 ④ 셔터2명 3층 스크린샷터 설치 ⑤ 지열3명 기계실 배관작업 ⑥ 도장2명 1층 벽체 퍼티작업 ⑦ 미장3명 1층 창호주위 미장 보강				현장근로자 23명
’18.3.16	① 직영2명 현장청소 ② 조적5명 외부적벽돌 쌓기 ③ 미장3명 지층 미장마감 ④ 외단열5명 배면우레탄보드 부착 ⑤ 수장6명 2층 텍스 및 1층 벽체스터드 작업 ⑥ 지열3명 기계실 배관작업 ⑦ 타일공5명 1~3층 화장실벽 타일부착 ⑧ 비계4명 외부비계 보강 및 해체 후 재설치 ⑨ 토목4명 옹벽형틀 설치 ⑩ 도장2명 1~3층 퍼티 및 1차벽체 수성도장 ⑪ 잡철5명 전면 외부 하지철물 및 외부판넬 설치 ⑫ 창호2명 1층 회의실 형틀 설치				현장근로자 46명