투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청[세종대로 역사문화 특화공간 조성 기계공사 ]

1. 정림 역사문화 17-197(2018.03.15)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인「세종대로 일대 역사문화 특화공간조성 기계설비공사」에 대하여 준공기한 연기 요청 하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 연기내용

구분	공 사 기 간		공사금액(원)	증감	비 고
	당 초	변 경
총차	‘16.11.30~’18.4.25	변경없음	695,682,000	변경없음	기간연장
1차	‘16.11.30~’18.3.31	‘17.11.30~’18.4.25	200,000,000	변경없음	기간연장

나. 준공기한 연기사유

- 선행공정(토목,건축)의 지연으로 기계설비공사 시기 미도래

다. 귀책소재 : 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공기한 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	이호기		환경설비과장	여인웅		설비부장	03/16 권오식
협조자
시행	설비부-3520	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8617	/전송	3708-8659	/	chance21@seoul.go.kr	/	대시민공개