문서번호	역사도심재생과-3301
결재일자	2018.3.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		다시세운관리팀장	역사도심재생과장
김태현		이광구	03/19 양병현
협조

- 세운상가군 옥상 마스터플랜 기본구상 수립용역 - 준공기한 연기 보고

2018. 3.

도시재생본부

(역사도심재생과)

- 세운상가군 옥상 마스터플랜 기본구상 수립용역 - 준공기한 연기 보고

세운상가군 옥상 마스터플랜 기본구상(안)에 대한 관련전문가 자문 및 주민의견 청취 등 절차 이행을 통한 내실 있고, 실행력 있는 기본구상(안)을 수립하기 위해 준공기한을 연기하고자 함.

용역개요

❍ 용 역 명 : 세운상가군 옥상 마스터플랜 기본구상 수립용역

❍ 용역기간 : 2017. 12. 6. ∼ 2018. 3. 30.

❍ 계약금액 : ************

❍ 계 약 자 : ***********

추진내역

❍ 2017.11.30 : 용역방침

❍ 2017.12.05 : 용역계약(용역착수: ‘17.12.06)

❍ 2017.12.21 : 착수보고

❍ 2018.01.16 : 주민간담회(신성아파트, 진양아파트)

❍ 2018.02.13 : 검토회의

❍ 2018.03.13 : 주민간담회(신성아파트)

❍ 2018.03.15 : 주민간담회(진양아파트)

준공기한 연기

❍ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경
용역기간	2017. 12. 6.∼2018. 3. 30.	2017. 12. 6.∼2018. 5. 15.
계약금액	16,500,000원	변경없음

❍ 귀책사유 : 서울특별시

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 연기사유

- 세운상가군 옥상 마스터플랜 기본구상(안)에 대한 관련전문가 자문 및 주민의견 청취 등 절차 이행을 통한 내실 있고, 실행력 있는 기본구상(안)을 수립하기 위해서는 추가 과업기간이 필요하므로 위와 같이 준공기한을 연기하고자 함.

조치계획

❍ 변경계약 체결 의뢰(재무과)

향후계획

❍ 2018.03.       : 용역변경 계약

❍ 2018.03.~04. : 전문가 자문 및 주민의견 청취

❍ 2018.05.       : 용역결산 및 준공

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.