문서번호	도시철도계획부-2348
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		경전철관리과장	도시철도계획부장
송정아		정원영	03/20 김진팔
협조
	주무관		이석호

우이신설선 자금재조달 관련

금융부대비 총사업비 반영요청에 대한 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

‘18.03.16(금)

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

- 우이신설선 자금재조달 관련-

금융부대비 총사업비 반영요청에 대한 검토

사업시행자가 자금재조달 관련 금융부대비******를 총사업비로 인정해줄 것을 요청함에 따라 검토 결과를 보고드림

□ 사업시행자 요청 사항(‘18.03.12.)

○ 금융부대비※는 신구대주단 동일여부와 관계없이 사업비로 인정함이 일반적임

○ 금번 재조달은 기존 금융약정을 해지하고 신규 금융약정을 체결한 것으로 대주단의 구성이 동일하지 않음 ⇒ 금융부대비의 총사업비 반영 요청

**************

***************************************************************************************************************************************************************************************

□ 총사업비 반영 여부 적정성 검토 결과

○ 본 재조달은 구대주단의 대출금 인출 중단에 따른 사업의 도산위험을 해결하기 위한 것으로

○ 최초 금융약정 체결 시 이미 금융수수료를 얻은 대주단이 재조달을 통해 또다시 수수료 이익을 보는 것은 중복 소지가 있음.

○ 또한 대주단 수수료 절감 등 노력이 보여야 하나 타사업 대비 유사한 수준이며

○ PIMAC에서 이미 미인정한 것을 주무관청이 뒤집어 인정하기 어려움

**********************************

************************************************************************************

□ 향후 계획

○ 2018.3.15. : 금융부대비 총사업비 반영 요청에 대한 회신

********************************************

**********************************************

붙임. 자금재조달 관련 금융부대비 총사업비 반영 요청 공문 1부.  끝.