문서번호	배수과-2241
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	배수과장		급수부장		상수도사업본부부본부장
최호림	이용구		이규상		03/20 구아미
협 조

‘18년 공원 아리수 음수대 설치계획 보고

2018. 3.

상수도사업본부

급수부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

’18년 공원 아리수 음수대 설치계획 보고

공원등을 이용하는 시민들이 건강하고 안전한 아리수를 마실 수 있도록 음수대를 설치하여 음용환경 조성 및 음용률 향상에 기여코자 함

□ 상수도사업본부 공원 음수대 설치 현황

구 분		공원 관리부서 설치		상수도사업본부 설치 (2008～2017년)
공원 합계	음수대 합계	공원	음수대	공원	음수대
824개소	1,310대	625개소	1,097대	199개소	213대

□ 2018년 설치계획

❍ 설치대상 : 공원음수대 설치 30대

❍ 사 업 비 : 750백만원

❍ 설치기간 : ‘18. 3. ~ ’18. 9.

❍ 사업소별 설치대상

(단위 : 백만원)

구 분	계	중부	동부	북부	강서	남부	강동
공원(개소)	30	6	7	3	8	4	2
음수대(대)	30	6	7	3	8	4	2
예 산	540	116	104	39	189	59	33

- 설치 음수대 모델

Drop Plop(4대)	퓨어:無(9대)	Running Water(17대)

※ 설치 음수대 모델은 구청 등 공원관리부서에서 선정하여 신청함

❍ 설치방법 : 조달구매(제3자단가계약) 설치

- Drop Plop 및 퓨어:無 음수대는 신규 조달등록하여 사업소 자체 구매설치

- Running Water 음수대는 기 조달등록 되어 있음

※ 음수대 신규 조달등록 업무는 붙임『공원음수대 조달등록 시행계획(안)』에 의거 시행

❍ 추진 일정

- ’18. 3. ~ 6. : 현장조사 및 기존 음수대(Running Water) 설치

- ’18. 3. ~ 5. : 음수대(Drop Plop, 퓨어:無) 조달등록

- ’18. 4. ~ 9. : 부대공사 및 음수대(Drop Plop, 퓨어:無) 설치

□ 예산 집행 계획

❍ 배관 공사비(30대) 및 음수대(30대) 설치비 : 540백만원

- 수요처(자치구 등)에서 선정한 모델에 따라 수도사업소에서 음수대를 구매하여 설치(조달구매)

❍ Drop Plop 및 퓨어:無 음수대의 경우 본부에서 발주하여 설치예정 이었으나 조달등록 후 사업소 자체 조달구매 설치로 전환

- 나머지 예산(210백만원)은 추후 사업소 예산 부족시 추가 배정

□ 공원 음수대 설치기준

❍ 음수대 설치기준

- 수돗물 사용량이 계측될 수 있도록 계량기 이후에서 분기・공급되어야 함

- 음수대 설치 후 청소 및 유지관리를 할 수 있는 자치구 등 공원관리부서가 있어야 설치 가능

❍ 현장조사 주요 내용

- 음수대 배관시공 : 수도계량기에서 음수대까지 배관은 STS 20~25㎜관으로 수도사업소에서 배관시공

- 음수대 설치위치 : 공원 내 시민통행이 많고 유지관리가 용이한 곳에 관리부서와 협의하여 설치

❍ 현장조사 시 유의사항

- 음수대 담당은 반드시 기전팀과 합동 조사하여 음수대 내부에 설치되는 냉각기 작동에 필요한 전기공사가 이루어질 수 있도록 할 것

- 아리수 음수대는 직결급수로 음용할 수 있도록 배관 설계

- 해당기관의 시설물 책임자와 합동조사하여 음수대 위치 선정 등을 협의

- 음수대 설치 지점은 화장실 주변이나 자전거 보관소 등 음용환경이 좋지 않은 곳은 피하여 설치

- 음수대 설치 완료 후에는 공원관리부서에 관리전환 후 준공처리

□ 행정 사항

❍ 음수대 설치 완료 후 GIS에 현황자료 입력

- 공원음수대 설치 현황을 GIS에 입력하여 관리

❍ 자치구 등 공원관리부서에 물품관리전환 실시

- 음수대 설치 완료 후 ‘물품관리전환 합의서’, ‘음수대 관리카드’, ‘음수대 관리 매뉴얼’을 대상기관에 송부

❍ 수도사업소에서 공원음수대 관리대장 작성하여 관리

❍ 음수대 설치 사업 예산이 조기에 집행될 수 있도록 사업소별 예산 배정

붙임 : 1. ‘18년 공원음수대 설치대상 목록 1부.

2. 공원음수대 조달등록 시행계획(안) 1부.

3. 공원음수대 관리대장(양식) 1부.  끝.